11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
범천2동 친환경스 카이웨이 주차장 건설	5,300	24	1,715	3,561	2015	2013	24
초읍동 한신-대우아 파트간 도로개설	7,600	2,700	2,500	2,400	2016	2013	75
어린이청소년 도서관 건립	2,000	0	0	2,000	2015	2014	1
범천2동 동일아 파트주변 도로개설	3,540	0	540	3,000	2017	2014	5

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

친환경스카이웨이 주차장 건설

(범천동 만리산 공영주차장)

담당자

교통행정과 김덕진(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부산항 제8부두, 영도 등을 전체적으로 조망할 수 있고, 주택밀집지역

내 주차공간이 부족한 지역에 친환경 스카이웨이 주차장 건설로 주민

휴식공간 제공 및 주차공간 확충

□ 사업개요

○ 기  간 : 2013. 07 ~ 2015. 12

○ 위  치 : 부산진구 엄광로 495번길 13일원

○ 규  모 : 자주식 주차장(4층5단, 93면)

○ 착공일 : 2014. 11. 04,   ○ 준공일 : 2015. 09. 14

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,306백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	5,300	24	1,715	3,561
국 비
교 부 세
시 도 비	2,000	12	1,078	909
시군구비	3,300	12	636	2,652
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ ‘13. 05. 28 : 도시관리계획(주차장) 결정 및 지형도면 고시

○ ‘14. 07. 23 : 도시계획시설사업 실시계획고시

○ ‘14. 11. 04 : 공사착공

□ 향후계획

○ ‘15.  9. 14 : 공사준공

○ ‘15. 12. 20 : 공사완료공고

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

초읍동 한신APT~대우APT간 도로개설

담당자

건설과 최원호(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설이 부족한 부산진구 초읍동 원당골 고지대에 도로를 확충하여

지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011 ~ 2016

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 366-7번지 ~ 402-16번지(임)

○ 규  모 : 도로개설 L=400m, B=10m

○ 착공일 : 2013. 10. 25

○ 준공일 : 2016.  4. 30

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	7,600	2,700	2,500	1,000	1,400
국 비
교 부 세
시 도 비	200	200
시군구비	2,900		1,500		1,400
지 방 채
민간자본
기 타	4,500	2,500	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2013. 11 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 12 : 1차공사 준공 (L=130m, B=10m)

□ 향후계획

○ 2015. 8 : 2차공사 준공 (L=65m, B=10m)

○ 2016. 4 : 3차공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

부산진구 어린이·청소년도서관 건립

담당자

문화관광체육과 신윤순 (☎605-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이 청소년 위주의 특성화 도서관을 조성하여 독서 및 문화 격차를 해소

○ 생활 친화적 문화공간으로 자기 계발 및 건전 여가 문화 창출

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 11월 ~ 2015년 11월

○ 위    치 : 부산진구 백양순환로17번길 25(부암3동 주민센터)

○ 사업규모 : 795.89㎡(지상 3,4층), E/V설치

○ 착공일 : 2015. 6. 22.

○ 준공일 : 2015. 11. 18.(예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	2,000			2,000
국 비	1,000			1,000
교 부 세
시 도 비	500			500
시군구비	500			500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 전체 공사 준비 및 외부 비계설치 가설작업

○ 석면 신고 및 철거

□ 향후계획

○ 2015. 12월 개관(예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

범천2동 동일아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 성기욱(☎ 4705)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동일아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014～2017

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 동일아파트 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=190m, B=15m

○ 착공일 : 2014년

○ 준공일 :

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	3,540		540		500	2,500
국 비
교 부 세	500		500
시 도 비	3,000				500	2,500
시군구비	40		40
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 보상절차 및 실시설계 시행중

□ 향후계획

○ 미개설구간 보상 및 도로개설 시행 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

11-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당사항 없음

11-3. 민간투자사업 ▷ 해당사항 없음