9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
국민체육센터 건립	10,700	886	3,362	6,452	2016	2012	27
양정1동 생활문화센터건립	3,956	1,459	1,273	1,224	2016	2014	80
부전1동 생활문화센터건립	6,250	0	3,080	3,170	2016	2015	5
전포1동 생활문화센터건립	3,481	0	10	3,471	2017	2015	5
친환경스카이웨이 주차장 건립	5,306	5,306	-	-	2015		100
초읍한신-대우아파트간 도로개설	6,700	5,200	1,500	-	2015	2011	98
부산진구어린이 청소년도서관 건립	1,984	-	1,984	-	2015	-	100
범천2 동일아파트 주변 도로개설	3,540	540	500	2,500	2019	2014	29

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2015년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

부산진구 국민체육센터 건립

담당자

체육진흥계 설창수(☎605-4094)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구민의 건전한 여가활동과 건강 증진을 위한 국민체육센터 건립

○ 열악한 고지대의 주거환경개선 위한 품격 있는 체육시설 조성

○ 자연속 힐링 국민체육센터 조성으로 생활체육 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2012. 1 ~ 2016. 8

○ 위 치 : 부산진구 전포동 326-11

○ 규 모 : 지하2층/지상2층, 연면적 3,745.40㎡(수영장, 다목적체육관 등)

○ 착공일 : 2015. 1. 5

○ 준공일 : 2016. 8. 26

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,700백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	10,700	886	3,362	6,452
국 비	3,100	258	2,292	550
교 부 세	1,400	--	104	1,296
시 도 비	3,000	34	966	2,000
시군구비	3,200	594	-	2,606
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

○ 기존 건축물 철거작업 완료

○ 국민체육센터 건립 건축공사 시행중(건축 공정율 : 27%)

- 토목공정 진행중

□ 향후계획

○ 2016년 12월 준공(극경암 발생으로 공기지연 예상됨)

○ 2017년 1월 개관 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 공정 중 경암 발생으로 공기 지연되어 경암회피 설계변경 추진(2016년 2월중)

□ 사업변경 내역

사업명

양정1동 생활문화센터 건립

담당자

양정1동 이은지(☎605-6606)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후하고 협소한 통합동사를 생활문화센터와 복합시설로 이전 건립하여       행정․문화․복지서비스 제공 가능한 복합 공공청사로 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 부산진구 동평로 406번길 38(양정동 397-5번지)

○ 규 모 : 부지 588.8㎡, 건물 1,330.69㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,956백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,956	1,459	1,273	1,224
국 비	600		541	59
시 도 비	556		288	268
시군구비	2,800	1,459	444	897
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2014년 6～9월 문화체육관광부 공모 확정 및 보조금 교부

○ 2015년 4월    설계용역

○ 2015년 6월    착공

□ 향후계획

○ 2016년 3월    준공 및 개관

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	사 유
사업기간	2013년~2014년	2013년~2016년	리모델링에서 신축조성으로 변경되어 사업규모와 사업비 증가
사업규모	부지588.8㎡ 건물1,349㎡(지하1, 지상5)	부지588.8㎡ 건물1,330.69㎡(지하1, 지상5)
사 업 비	3,500백만원	3,956백만원

사업명

부전1동 청소년문화센터건립

담당자

부전1동 이종광(☎605-6512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후하고 협소한 통합동사를 청소년문화센터와 복합시설로 이전 건립함       으로써 주민의 편의 제공 및 문화생활에 크게 도움을 줄 수 있는 공공        청사로 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 부산진구 부전동 25-1번지

○ 규 모 : 부지 616.5㎡, 건물 1,722.64㎡(지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,250백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,250		3,080	3,170
국 비	1,716			1,716
시 도 비	117			117
시군구비	4,417		3,080	1,337
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015년  3월  부전1동사(청소년문화센터) 건립 계획

○ 2015년  6월  부지취득

○ 2015년  9월  도시관리계획 중복(청소년문화센터) 결정

□ 향후계획

○ 2016년  3월  설계용역 납품

○ 2016년  4월  공사 발주

○ 2016년 10월  준공 및 개관

사업명

전포1동 생활문화센터 건립

담당자

전포1동 이창경(☎605-6657)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 이상된 노후된 통합동사를 생활문화센터와 복합시설로 공유함으로써       주민의 편의제공 및 문화생활에 크게 도움을 줄 수 있는 공공청사로 건립

하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 부산진구 서전로68번길 75(전포동 341-2)

○ 규 모 : 부지 671.2㎡, 건물 2,022.37㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,481.409백만원                               (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,481.409		10.269	3,471.140
국 비	600			600
시 도 비	592			592
시군구비	2,289.409		10.269	2,279.140
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015년 5월  문화체육관광부 공모 선정

□ 향후계획

○ 2016년 2월  부산시의회 공유재산 심의(건물 기부채납 시유지 무상사용)

○ 2016년 7월  설계용역 납품

○ 2016년 8월  착공

○ 2017년 2월  준공 및 개관, 전포1동사 건물 기부채납(소유권 이전)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	사 유
사업기간	2015년~2016년	2015년~2017년	리모델링에서 신축조성으로 변경되어 사업규모와 사업비 변경
사업규모	부지1,358.9㎡ 건물1,735㎡(지하1, 지상5)	부지671.2㎡ 건물2,022.37㎡(지하1, 지상5)
사 업 비	3,500백만원	3,481백만원

사업명

친환경스카이웨이 주차장 건립

담당자

주차관리과 최윤철(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부산항 제8부두, 영도 등을 전체적으로 조망할 수 있고, 주택밀집지역내 주차공간이 부족한 지역에 친환경 스카이웨이 주차장 건설로 주민 휴식공간 제공 및 주차공간 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 07. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 부산진구 엄광로 495번길 13일원

○ 규 모 : 자주식 주차장 (4층5단, 89면), 부지면적 1,362㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,306백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,306	5,306
국 비
시 도 비	2,000	2,000
시군구비	3,306	3,306
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13. 05. 28. : 도시관리계획(주차장) 결정 및 지형도면 고시

○ ‘14. 07. 23. : 도시계획시설사업 실시계획고시

○ ‘14. 11. 04. : 공사착공

○ ‘15. 12. 20. : 공사준공

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 사업기간 ┌ 당초 : 2014. 07. 23. ~ 2015. 12. 31.

└ 변경 : 2014. 07. 23. ~ 2016. 01. 13.

사업명

초읍동 한신APT～대우APT간 도로개설

담당자

건설과 김정수(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설이 부족한 부산진구 초읍동 원당골 고지대에 도로를 확충하여

지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011 ~ 2016

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 366-7번지 ~ 402-16번지(임)

○ 규  모 : 도로개설 L=400m, B=10m

○ 착공일 : 2013. 10. 25.

○ 준공일 : 2016.  5. 27.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,700	5,200	1,500
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	1,500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타	5,000	3,500	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 11 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 12 : 도로개설 L=130m, B=10m

○ 2015. 08 : 도로개설 L= 65m, B=10m

○ 2016. 05 : 도로개설 L=205m, B=10m

□ 향후계획

○ 없음

사업명

부산진구어린이청소년도서관 건립

담당자

문화체육과 신윤순(☎605-4062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이 청소년 위주의 특성화 도서관을 조성하여 독서 및 문화 격차를 해소

○ 생활 친화적 문화공간으로 구민들의 자기 계발 및 건전 여가 문화 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 11월 ~ 2015. 11. 28.

○ 위 치 : 부산광역시 부산진구 백양순환로110번길 25(부암동)

○ 규 모 : 795.89㎡ (지상 3층~4층 증축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,984백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,984		1,984
국 비	992		992
시 도 비	496		496
시군구비	496		496
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도서관 준공 : 2015. 11. 28.

○ 도서관 개관 : 2016. 1. 29.

□ 향후계획

○ 연간 운영비 : 584,785천원(국 30,690, 시 125,311, 구 428,784)

○ 주요 운영 계획

- 정보 장서확충 : 도서 , 비도서, 기증도서 수집 등

- 웹 중심의 도서관 서비스 제공 : 통합 홈페이지 운영, 무선 WIFI, RFID 시스템 구축 등     - 맞춤형 정보서비스 제공 : 책나래, 책바다서비스, 추천도서 홈페이지 게재

- 독서문화 확산을 위한 행복한 책읽기 추진 : 1일독서교실, 방학독서교실, 도서관주간,

독서의달 행사 등

- 수요자 맞춤형 강좌 운영 : 어린이동화구연교실, 여름방학특강, 독서문화강좌

사업명

범천동 동일아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 심영배(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동일아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014년~2019년

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 동일아파트 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=240m, B=15m

○ 착공일 : 2014년

○ 준공일 :

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,540	540	500	-	2,500
국 비
시 도 비	2,500				2,500
시군구비	1,040	540	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

○ 보상절차 및 실시설계 시행중

○ 지장물 철거 4동 진행 중

□ 향후계획

○ 미개설구간 보상 및 도로개설 시행 예정

9-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당없음

우리 부산진구에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

9-3. 민간투자사업 ▷ 해당없음

우리 부산진구에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.