109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
부산진구 국민체육센터 건립	11,300	4,248	2,393	4,659	2017	2012	62
초읍동 한신~대우 아파트간 도로개설	6,700	6,700	-	-	2016	2011	100
양정1동사 생활문화센터건립	3,956	2,734	1,222	-	2016	2014	100
당감 행복한 마을 만들기 사업	3,952	1,000	1,155	1,797	2018	2014	50
범천2동 동일아파트 주변 도로개설	3,540	1,040	500	2,000	2019	2014	43
부전1동사 청소년문화센터건립	6,250	3,080	1,475	1,695	2017	2015	90
전포1동사 생활문화센터건립	3,536	10	493	3,033	2017	2015	10
성지복합문화센터 (초읍동사) 건립	6,680	-	3,307	3,373	2017	2016	15
당감4동사 (건강생활지원센터) 건립	5,430	-	1,746	3,684	2018	2016	5
도시재정비촉진사업 지원	44,706	-	14,905	29,801	2018	2016	30
전포동~서면아파트 일원 도로개설	2,500	-	500	2,000	2018	2016	20

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황                            (작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

부산진구 국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 설창수(☎605-4094)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구민의 건전한 여가활동과 건강 증진을 위한 국민체육센터 건립

○ 열악한 고지대의 주거환경개선 위한 품격 있는 체육시설 조성

○ 자연 속 힐링 국민체육센터 조성으로 생활체육 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2012. 1 ~ 2017. 5

○ 위  치 : 부산진구 전포동 326-11

○ 규  모 : 지하2층/지상2층, 연면적 3,837.15㎡(수영장, 다목적체육관 등)

○ 착공일 : 2015. 1. 5

○ 준공일 : 2017. 7월 예정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,300	4,248	2,393	4,659
국 비	3,100	2,550	550	-
시 도 비	3,000	1,000	541	1,459
시군구비	3,800	594	6	3,200
지 방 채
민간자본
기 타	1,400	104	1,296	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

○ 기존 건축물 철거작업 완료

○ 국민체육센터 건립 건축공사 시행중(건축 공정율 : 62%)

- 공영주차장 지하1층 전기실 및 물탱크실 구축

- 본관동 지하2층, 지하1층, 지상1층, 지상2층 등 철근콘크리트 작업 완료

□ 향후계획

○ 2017년 7월 준공/2017년 8월 개관(예정)

□ 사업변경 내역

○ 극경암 발생에 따른 암파쇄 기간 설계 변경 및 공기 지연

○ 사업비 변경 (당초 11,300백만원 11,490백만원 / 2017년 본예산 1억 9천만원  증액)

○ 사업 준공일 당초 2016. 12. 10.에서 2017. 5. 31.로 연장됨

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

초읍동 한신~대우 아파트간 도로개설

담당자

건설과 윤원재(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설이 부족한 부산진구 초읍동 원당골 고지대에 도로를 확충하여

지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011 ~ 2016

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 366-7번지 ~ 402-16번지(임)

○ 규  모 : 도로개설 L=400m, B=10m

○ 착공일 : 2013. 10. 25.

○ 준공일 : 2016.  5. 27.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,700	6,700
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	1,500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타	5,000	5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 11. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2014. 12. : 도로개설 L=130m, B=10m

○ 2015. 08. : 도로개설 L= 65m, B=10m

○ 2016. 05. : 도로개설 L=205m, B=10m

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 7,600백만원 ⇒ 6,700백만원

○ 사유 : 도로법면부 토지보상비 절감에 따른 총사업비 감소

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

양정1동사(생활문화센터) 건립

담당자

양정1동 이은지(☎605-6606)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동사 건물의 노후화 및 입지적 편중에 따른 주민불편 해소 및 생활권내       체험형 문화여가 시설 건립을 통한 문화기반 확충

□ 사업개요

○ 조성위치 : 부산진구 동평로 406번길 38(양정동)

○ 조성기간 : 2014년 6월 ~ 2016년 2월

○ 조성규모 : 연면적 1,330.69㎡ (지하1층/지상5층)

○ 착 공 일 : 2015년 6월 26일 건축공사 착공

○ 준 공 일 : 2016년 2월 29일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,956백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,956	2,734	1,222
국 비	600	543	57
시 도 비	556	287	269
시군구비	1,800	904	896
지 방 채
민간자본
기 타	1,000	1,000	-

□ 추진상황

○ 건립공사 완료

2016. 2. 29. 양정1동 주민센터 이전 업무개시

□ 사업변경 내역

구 분	조성면적(㎡)	총사업비(백만원)	사업기간	비 고
변경 전	1,349	3,500	14년 7월 ~ 14년 12월
변경 후	1,330.69	3,956	~ 16년 2월	구비 500백만원 확보 (‘15년 1회 추경시)

※ 시도비 당초 600백만원에서 현물인정비 44백만원 제외하여 556백만원 교부 받음

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

당감 행복한 마을 만들기 사업

담당자

창조도시과 이정의(☎605-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 주거환경 정비를 통한 주거 인프라 확충

○ 다양한 지역자원들과 연계하여 주민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 공동       작업장 운영 등을 통한 경제적 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년~2018년

○ 위  치 : 당감1동 4통,5통,10통 / 42,000㎡

○ 내  용 : 골목길 정비사업, 마을인프라(주민쉼터, 경로당, 방재공원 등)

확충, 소단위 주거환경 정비사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,952백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,952	1,000	1,155	1,147	650
국 비	1,976	500	770	381	325
시 도 비	988	250		575.5	162.5
시군구비	988	250	385	190.5	162.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 2015. 6. ∼ 2016.  7. : 생활인프라 확충시설 조성부지 매입 완료(726백만원)

○ 2016. 9. ∼ 2016. 11. : 주민역량강화사업 제2기 주민대학 운영

○ 2016. : 주민쉼터 준공, 방재공원 2개소 준공, 도로정비공사 준공

○ 2017. 1. : 주민사랑방 준공, 빛뜰(마을마당) 조성사업 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2017. 2. 27  : 당감 행복드림센터 준공(예정)

○ 2017. : 할머니산책로 조성, 당감시장입구 쉘터 정비, 노후주거개선사업 등

○ 2018. : 노후주거개선사업 등

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

범천2동 동일아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 박진희(☎605-4705)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동일아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014년~2019년

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 동일아파트 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=240m, B=15m

○ 착공일 : 2014년

○ 준공일 : 2019년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,540	1,040	500	800	1,200
국 비
시 도 비	2,000	-	-	800	1,200
시군구비	1,540	1,040	500	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 도로개설 시행 중 L=18m

○ 도로개설 추진 준비 중 L=100m

□ 향후계획

○ 미개설구간 보상 및 도로개설 시행 예정

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

부전1동사(부산진구 청소년문화센터) 건립

담당자

부전1동 이승도(☎605-6502)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부전1동 동 통합에 따른 신축 동사 건립(청소년 수련시설 복합)

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015. 1. 1. ~ 2017. 3. 6.

○ 위  치 : 부전동 25-1(세흥병원 뒤)

○ 규  모 : 지상1층 ~ 6층, 연면적 1,722.64㎡, 층별 약 340㎡(1~5층, 6층 펌프실)

○ 착공일 : 2016. 4. 29.

○ 준공일 : 2017. 3. 6.(예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,250	3,080	1,475	1,695
국 비	1,716	-	668	1,048
시 도 비	117	-	64	53
시군구비	3,417	2,500	743	174
지 방 채
민간자본
기 타	1,000	580	-	420

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2014. 10월 : 부전1동사 신축 계획 수립

○ 2015.  6월 : 신축 동사 부지 매입

○ 2016.  3월 : 실시설계용역 완료

○ 2016.  4월 : 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 준공계 접수 및 준공 검사 등 공정 추진

○ 동사이전(개관식) 및 각종시설물 안전관리 계약 추진

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

전포1동사(생활문화센터) 건립

담당자

전포1동 이창경(☎605-6657)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 이상 노후된 통합동사를 생활문화센터와 복합시설로 공유함으로써       주민 편의제공 및 문화생활에 크게 도움을 줄 수 있는 다목적 공공청사로        건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 9월 ~ 2017. 4월

○ 위  치 : 부산진구 서전로68번길 75(전포동 341-2번지)

○ 규  모 : 부지 671.2㎡, 건물 2,016.30㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,536백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,536	10	493	3,033
국 비	600	-	388	212
시 도 비	592	-	15	577
시군구비	1,744	10	90	1,644
지 방 채
민간자본
기 타	600	-	-	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 7월  전포1동사(생활문화센터)건립 설계완료

○ 2016. 8월  전포1동사(생활문화센터)건립 공사 입찰 및 계약실시

○ 2016. 9월  착공

○ 2017. 1월 기초공사 및 지하1층 골조완성

□ 향후계획

○ 2017. 8월 전포1동사(생활문화센터) 준공 및 개관(예정)

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

성지복합문화센터(초읍동사) 건립

담당자

초읍동 김태근(☎605-6582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 동사를 문화복합시설의 공공청사로 이전 건립하여 행정□복지 서비스와       체험형 문화여가 공간을 함께 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 6월 ~ 2017. 12월

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 291-38번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 727.3㎡, 건축연면적 1,704.1㎡ (지상5층)

○ 사업비 : 6,680백만원(부지3,300 건축3,380)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,680	-	3,307	3,373
국 비	1,000	-	-	1,000
시 도 비	1,150	-	-	1,150
시군구비	4,030	-	3,307	723 (675미확보)
지 방 채
민간자본
기 타	500	-	-	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2015. 12월  문체부 ‘문화시설 확충 및 운영사업’ 선정

○ 2016.  5월  부산시 지방재정 투자심사 승인

○ 2016.  6월  부지 매입

○ 2016.  9월  설계 착수

□ 향후계획

○ 2017.  1월  실시설계 완료

○ 2017.  2월  시공사 및 감리자 선정

○ 2017.   3월  착공

○ 2017.  10월  준공

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

당감4동사(건강생활지원센터) 건립

담당자

당감4동 정창주(☎605-6807)

□ 사업목적 및 필요성

○ 40년 이상된 노후 동사를 지역의 중심지로 이전하여 주민 접근성을 최적화       하고 건강생활지원센터와 복합시설로 구성하여 주민들에게 건강서비스를       제공하는 공공청사로 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 4월 ~ 2018. 3월

○ 위  치 : 부산진구 당감동 696-1번지외 3필지

○ 규  모 : 부지 1,160㎡, 건물 1,650㎡(지상 6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,430		1,746	3,233	451
국 비	919		-	919	-
시 도 비	230		-	230	-
시군구비	3,681		1,746	1,484	451
지 방 채
민간자본
기 타	600		-	600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 12월  보건복지부 ‘건강생활지원센터 확충사업’ 선정

○ 2016.  4월  사전심사 승인

○ 2016.  8월  토지매입완료

○ 2016. 12월  설계용역계약

□ 향후계획

○ 2017.  6월  설계용역 준공

○ 2018.  3월 건립공사 준공

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 진충현(☎605-4616)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업 조속 추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=545m, B=20~24m→40m

○ 착공일 : 2017.  9.

○ 준공일 : 2018. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,706백만원(보상 38,006, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	44,706	-	14,905	18,488	11,313
국 비	44,706	-	14,905	18,488	11,313
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 1~3월 : 지장물건조사

○ 2016. 4~6월 : 보상열람공고, 감정평가실시

○ 2016. 7~10월 : 보상협의

○ 2016. 11월 : 수용재결 신청(중앙토지수용위원회)

□ 향후계획

○ 2017.  3월 : 수용재결 보상금 지급 및 공탁

○ 2017.  9월 : 지장물 철거공사(L=535m, B=20~25→40m) 착공

○ 2018. 12월 : 공사준공

(작성기준 : 2016.12.31.)

사업명

전포동~서면아파트일원 도로개설

담당자

건설과 김영호(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진남로와 연결되는 서면아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2018년

○ 위  치 : 전포2동 산99-46번지, 33-351번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=180m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도
계	2,500	-	500	-	2,000
국 비
시 도 비	2,000	-	-	-	2,000
시군구비	500	-	500	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 보상 시행 중

□ 향후계획

○ 미개설구간 보상 및 도로개설 시행 예정

10-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당 없음

우리 부산진구에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행 사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업 ▷ 해당 없음

우리 부산진구에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.