109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
부산진구 국민체육센터 건립	11,490	6,641	4,849	-	2017	2012	100
범천2 주거환경개선사업	4,685	-	2,482	2,203	2021	2014	50
가야2동 603번지 일원 도로개설	2,000	-	500	1,500	2018	2014	20
당감 행복한 마을 만들기 사업	3,952	2,155	1,147	650	2018	2014	70
당감1동 동평로116번길 도로개설	2,700	-	2,200	500	2019	2014	30
부전1동사 (청소년문화센터)건립	6,250	4,555	1,695	-	2017	2015	100
전포1동사 (생활문화센터)건립	3,482	503	2,979	-	2017	2015	100
성지문화복합센터 (초읍동사) 건립	6,680	3,307	1,565	1,808	2018	2016	90
당감4동사 (건강생활지원센터) 건립	5,000	1,746	372	2,882	2018	2016	42
도시재정비촉진사업 지원	44,706	14,905	19,880	9,921	2018	2016	50
전포동~서면아파트 일원 도로개설	2,500	500	350	1,650	2019	2016	20
당감동 백양순환로42번길 일원 도로개설	3,100	800	2,300	-	2019	2016	15
가야유원지 주차장 조성	2,011	-	1,890	121	2018	2016	10

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

부산진구 국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 이승현(☎605-4095)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구민의 건전한 여가활동과 건강 증진을 위한 국민체육센터 건립

○ 열악한 고지대의 주거환경개선 위한 품격 있는 체육시설 조성

○ 자연속 힐링 국민체육센터 조성으로 생활체육 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2012. 1. ~ 2017. 6.

○ 위  치 : 부산진구 전포동 326-11

○ 규  모 : 지하2층/지상2층, 연면적 3,837.15㎡(수영장, 다목적체육관 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,490백만원(※공영주차장 건립비 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,490	6,641	4,849
국 비	3,100	3,100
시 도 비	3,000	1,541	1,459
시군구비	3,990	600	3,390
지 방 채
민간자본
기 타*	1,400	1,400

* 특별교부세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014년 1월 설계착수, 2014년 8월 설계완료

○ 2015년 1월 5일 국민체육센터 건립공사 착공

○ 2017년 6월 30일 국민체육센터 건립 준공계 제출

○ 2017년 7월 14일 준공

○ 2017년 8월 31일 개관

□ 향후계획

○ 2017년 9월 1일 부 공식 운영

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

범천2 주거환경개선사업

담당자

건축과 김수철(☎605-4616)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역 개발여건 및 대상지 현황과 연계한 쾌적한 주거환경 조성

○ 주거의 안정성 및 편리성의 충족과 주거생활의 질적 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2021

○ 위 치 : 범천동 1123-24번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 3개소(B=8~12m, L=316m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,685백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,685		2,482	926	1,277
국 비	2,342.5		1,241	463	638.5
시 도 비	1,171.25		620.5	231.5	319.25
시군구비	1,171.25		620.5	231.5	319.25
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 2015년 도활사업 공모 신청하여 2015년부터 연차별 예산 확보

○ 2015년 예산(국비 250, 시비 125, 구비 125)

○ 2016년 예산(국비 698, 시비 349, 구비 349)

○ 2017년 예산(국비 293, 시비 146.5, 구비 146.5)

○ 2017. 4. 5. : 주거환경개선 정비계획 변경 고시

○ 2017. 5.29. : 정비기반시설조성 사업비 지원(구→LH)

□ 향후계획

○ 2018. 02. : 사업시행 인가

○ 2018. 12. : 공사 착공

○ 2021. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

가야2동 603번지 일원 도로개설

담당자

건설과 김영호(☎605-4705)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미개설에 따른 주변 기개설도로와 비교 주민불만 해소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년~2018년

○ 위  치 : 가야2동 603-2번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=145m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		500	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	2,000		500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2017. 9. 실시설계 용역완료 (L=145m, B=8m)

○ 2017. 9. 1차 구간 보상 중

□ 향후계획

○ 2018. 이후 2차 구간 보상 및 도로개설 시행 예정

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

당감 행복한 마을 만들기 사업

담당자

창조도시과 신용석(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 주거환경 정비를 통한 주거 인프라 확충

○ 다양한 지역자원들과 연계하여 주민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 공동       작업장 운영 등을 통한 경제적 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년~2018년

○ 위  치 : 당감1동 4통, 5통, 10통 / 0.42㎢

○ 내  용 : 골목길 정비사업, 마을인프라(주민쉼터, 경로당, 방재공원 등)

확충, 소단위 주거환경 정비사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,952백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,952	2,155	1,147	650
국 비	1,976	1,270	381	325
시 도 비	988	250	575.5	162.5
시군구비	988	635	190.5	162.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○2015. 6. ∼ 2016.  7. : 생활인프라 확충시설 조성부지 매입 완료(726백만원)

○2016. 9. ∼ 2016. 11. : 주민역량강화사업 제2기 주민대학 운영

○2016. : 주민쉼터 준공, 방재공원 2개소 준공, 도로정비공사 준공

○2017. 1. ~ 7. : 주민사랑방 준공, 행복드림센터 준공, 빛뜰(마을마당) 준공

○2017. 4. ~ 12. : 골목길디자인사업 실시설계 용역

□ 향후계획

○2018. 상반기 : 슬레이트 지붕 교체사업 추진, 골목길디자인사업 공사 착공

○2018. 하반기 : 골목길디자인사업 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

당감1동 동평로116번길 도로개설

담당자

건설과 김정수(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감1동 동평로116번길 (동일2차아파트 서측) 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위  치 : 당감1동 동평로116번길 동측 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=150m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,700		2,200	500
국 비
시 도 비	500			500
시군구비	1,000		1,000
지 방 채
민간자본
기 타*	1,200		1,200

* 특별교부세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 2017. 05월 : 예산확보 1,000백만원(2017년 제1회 추경)

○ 2017. 10월 : 실시설계 완료

○ 2017. 11월 : L=60m 구간 보상계획 열람공고

○ 2017. 12월 : 특별교부세 12억원 확보(2017년 간주예산)

□ 향후계획

○ 2018. 01월 : 시비보조금 5억원 확보(2018 본예산) L=90m 구간 열람공고

○ 2019. 12월 : 사업 완료

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

부전1동사(청소년문화센터) 건립

담당자

부전1동 이승도(☎605-6502)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부전1동 동 통합에 따른 신축 동사 건립(청소년 수련시설 복합)

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015. 1. 1. ~ 2017. 3. 6

○ 위  치 : 부전동 25-1(세흥병위 뒤)

○ 규  모 : 지상1층 ~ 6층, 연면적 1,722.64㎡

층별 약 340㎡(1~5층, 6층 펌프실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,250	4,555	1,695
국 비	1,716	668	1,048
시 도 비	117	64	53
시군구비	3,417	3,243	174
지 방 채
민간자본
기 타*	1,000	580	420

* 특별교부세, 교부금

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 10월 : 부전1동사 신축 계획 수립

○ 2015.  6월 : 신축 동사 부지 매입

○ 2016.  3월 : 실시설계용역 완료

○ 2016.  4월 : 건립공사 착공

○ 2017.  3월 : 건립공사 준공, 부전1동사 청소년문화센터 개소(3. 24.)

□ 향후계획

○ 신축 완공 후 민원행정 업무 등 추진 중

○ 건물 하자 등 이상 유무 계속 관찰 중

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

전포1동사(생활문화센터) 건립

담당자

전포1동 김은정(☎605-6657)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 이상 노후 된 통합동사를 생활문화센터와 복합시설로 공유함으로써       주민의 편의제공 및 문화생활에 크게 도움을 줄 수 있는 다목적 공공청사로

건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 9월 ~ 2017. 8월

○ 위  치 : 부산진구 서전로68번길 75(전포동 341-2번지)

○ 규  모 : 부지 671.2㎡, 건물 2,029.5㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,482	503	2,979
국 비	600	388	212
시 도 비	592	15	577
시군구비	1,690	100	1,590
지 방 채
민간자본
기 타*	600		600

* 특별교부세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 7월  전포1동사(생활문화센터)건립 설계완료

○ 2016. 8월  전포1동사(생활문화센터)건립 공사 입찰 및 계약 실시

○ 2016. 9월  착공

○ 2017. 1월  기초공사 및 지하1층 골조완성

○ 2017. 6월  외벽완성 및 내부인테리어 공사

○ 2017.08.03. 전포1동사(생활문화센터) 준공

○ 2017.08.25. 전포1동사(생활문화센터) 개소

□ 향후계획

○ 신축 완공 후 민원행정 업무 등 추진 중

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

성지문화복합센터(초읍동사) 건립

담당자

초읍동 배수한(☎605-6597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 동사를 문화복합시설 공공청사로 이전 건립하여 행정․복지 서비스와        체험형 문화여가 공간을 함께 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 6월 ~ 2018. 2월

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 291-38번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 727.3㎡, 건물 1,716㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,680	3,307	1,565	1,808
국 비	1,000		843	157
시 도 비	1,650		237	1,413
시군구비	3,530	3,307	3	220
지 방 채
민간자본
기 타*	500		482	18

* 특별교부세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 2015. 12월  문체부 ‘문화시설 확충 및 운영사업’ 선정

○ 2016.  5월  부산시 지방재정 투자심사 승인

○ 2016.  6월  부지 매입

○ 2017.  2월  실시설계 완료

○ 2017.  4월  착공

○ 2017.  12월 내장 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 2018. 2월  준공

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

당감4동사(건강생활지원센터) 건립

담당자

당감4동 정창주(☎605-6870)

□ 사업목적 및 필요성

○ 40년 이상 된 노후 동사를 지역의 중심지로 이전하여 주민 접근성을 최적화       하고 건강생활지원센터와 복합시설로 구성하여 주민들에게 건강서비스를       제공하는 공공청사로 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 4월 ~ 2018. 5월

○ 위  치 : 부산진구 당감동 696-1번지외 2필지

○ 규  모 : 부지 863㎡, 건물 1,630㎡(지상 5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	1,746	372	2,882
국 비	919		153	766
시 도 비	230		131	99
시군구비	3,251	1,746	88	1,417
지 방 채
민간자본
기 타*	600			600

* 특별교부세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 2015. 12월  보건복지부 ‘건강생활지원센터 확충사업’ 선정

○ 2016.  4월  사전심사 승인

○ 2016.  8월  토지매입완료

○ 2017.  7월  설계용역 완료

○ 2017. 11월  공사착공

□ 향후계획

○ 2018.  5월  준공

○ 2018.  6월  당감4동사(건강생활지원센터) 이전 및 개소

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 김수철(☎605-4616)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업의 조속추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1 ~ 2018. 12.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=545m, B=20~24m→40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,706백만원(보상 38,006, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	44,706	14,905	19,880	9,921
국 비	43,314	14,905	18,488	9,921
시 도 비	1,392		1,392
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016. 1~3월 : 지장물건 조사

○ 2016. 4~6월 : 보상열람공고, 감정평가 실시

○ 2016. 7~10월 : 보상협의

○ 2017. 6월 : 수용재결 보상금 지급 및 공탁

○ 2017. 12월 : 지장물 철거공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

전포동~서면아파트일원 도로개설

담당자

건설과 김영호(☎605-4705)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진남로와 연결되는 서면아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2019년

○ 위  치 : 전포2동 산99-46번지, 33-351번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=180m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500	500	350		1,650
국 비
시 도 비	1,650				1,650
시군구비	850	500	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 16년 이후 보상 시행 중

□ 향후계획

○ 아파트 대지권 보상시행

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

당감동 백양순환로42번길 일원 도로개설

담당자

건설과 정현의(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시기반시설을 확충함으로써 주거환경개선 및 주민숙원민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위  치 : 당감동 699-94번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=157m, B=8m

○ 착공일 : 2018. 01.

○ 준공일 : 2019. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,100	800	2,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,300		2,300
지 방 채
민간자본
기 타*	800	800

* 특별교부세, 교부금

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2015. 11. : 특별교부세 결정(300백만원)

○ 2015. 12. : 특별교부금 결정(500백만원)

○ 2016. 06. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ 2017. 01. : 구비 확보 (1,200백만원)

○ 2017. 04. : 1회 추경 구비 확보 (1,100백만원)

○ 2018. 01. : 1차 구간 공사 발주

□ 향후계획

○ 2018. 04. : 1차 구간 준공

○ 2018. 06. : 2차 구간 공사 발주

개별 투자심사 사업 추진현황(2017. 12. 31. 기준)

사업명

가야유원지 주차장 조성

담당자

주차관리과 김영지(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가야유원지 주변 주차장 절대 부족에 따른 주민불편 해소

○ 주차장조성을 통한 유원지와 연계한 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 가야동 491-5번지 일원

○ 규 모 : 1,366㎡, 지평식 주차 41면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,011백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,011		1,890	121
국 비
시 도 비	1,408		1,323	85
시군구비	603		567	36
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 06.  가야유원지 주차장 조성사업 실시계획 인가 신청

○ 2016. 12.  도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가 승인고시

○ 2017. 04  .도시계획시설(주차장) 보상계획 열람공고(건설과)

○ 2017. 09~12. 편입물건 손실보상 협의(1.2.3차)

□ 향후계획

○ 2018. 01~06. 도시계획시설(주차장)편입부지 재결신청

○ 2018. 07.     공사 착공

○ 2018. 10.     공사 준공

10-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당 없음

우리 부산진구에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행 사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업 ▷ 해당 없음

우리 부산진구에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.