109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
수정터널상부 공간연결사업	22,495	13,685	2,065	6,745	-	2019	2013	80
당감 행복한 마을 만들기 사업	3,881	2,368	702	811	-	2019	2014	80
도시재정비촉진사업(새싹로)	45,429	35,687	2,613	7,129	-	2019	2016	50
양정1동 주거지 전용주차장 조성	2,655	2,068	317	270	-	2019	2016	60
가야유원지 주차장 조성	2,011	64	1,826	121	-	2019	2016	80
부산시민공원 주변 지중화사업	2,000	-	1,200	800	-	2019	2017	55
전포카페거리 공공디자인사업	2,107	-	1,848	259	-	2019	2017	60
가야동 568-7번지 일원 도로개설	3,500	500	3,000	-	-	2019	2017	10
가야2동 1통지내 도로개설	2,840	1,200	300	1,340	-	2019	2018	52
개금2동사 건립	2,129	-	-	2,129	-	2020	2017	20
행복문화센터 (개금3동사) 건립	3,761	-	113	3,648	-	2019	2017	3
백양대로68번길 일원 도로개설	3,500	-	2,000	-	1,500	2020	2018	15
당감동 725-1번지 일원 도로개설	5,000	-	1,000	1,500	2,500	2020	2018	20

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2018년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘18년말 기준으로 작성

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

수정터널상부공간연결사업

담당자

창조도시과 신용석(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수정터널입구 상부에 인공지반을 조성하여 단절된 주민생활권을 연결하고       공원녹지를 확충하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014. ~ 2019.(6년)

○ 위  치 : 부산진구 관문대로 수정터널 입구

○ 규  모 : 9,000m²(L=180m, W=40 ~ 70m)

○ 내  용 : 인공지반(복개구조물), 커뮤니티센터, 공동체정원(녹지), 방음시설,

멀티프라자(놀이터, 주민운동시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,819백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	22,495	13,685	2,065	6,745			-
국 비	10,183	9,029	797	357			-
교 부 세
시 도 비	12,072	4,416	1,268	6,388			-
시군구비	240	240		-	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) ▷ 2013년 투자심사 완료

○ 도시관리계획(공원)결정 및 공원조성계획 결정 용역 : 2015. 6. ~ 2016. 6.

○ 수정터널 주변도로정비공사 : 2015. 12. ∼ 2016. 4.

○ 도시계획시설사업 실시계획인가 고시 : 2016. 6. 22.

○ 전기, 토목공사 착공 : 2017. 5.

○ 하부도로공사 완료, 상부 슬라브 콘크리트패널 설치 완료 : 2017. 12.

○ 건축공사 착공 : 2018. 5.

○ 토목공사 준공 : 2018. 6.

○ 건축공사 준공 : 2019. 1. (지상1층, 연면적 A=392.7㎡)

□ 향후계획

○ 2019. 상반기. : 조경공사 착공

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

당감 행복한 마을 만들기 사업

담당자

창조도시과 신용석(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 주거환경 정비를 통한 주거 인프라 확충

○ 다양한 지역자원들과 연계하여 주민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 공동       작업장 운영 등을 통한 경제적 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년~2019년

○ 위  치 : 당감1동 4통,5통,10통 / 0.42㎢

○ 내  용 : 골목길 정비사업, 마을인프라(주민쉼터, 경로당, 방재공원 등)

확충, 소단위 주거환경 정비사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,952백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,881	2,368	702	811
국 비	1,941	1,320	250	371
교 부 세
시 도 비	970	389	327	254
시군구비	970	659	125	186
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%) ▷ 2014년 투자심사 완료

○2015. 6. ∼ 2016.  7. : 생활인프라 확충시설 조성부지 매입 완료(726백만원)

○2016. 9. ∼ 2016. 11. : 주민역량강화사업 제2기 주민대학 운영

○2016. : 주민쉼터 준공, 방재공원 2개소 준공, 도로정비공사 준공

○2017. 1. ~ 7. : 주민사랑방 준공, 행복드림센터 준공, 빛뜰(마을마당) 준공

○2018. 3. : 골목길디자인사업 실시설계 용역 완료

○2018. 5. : 슬레이트 지붕 교체사업(3차) ▷ 29세대

○2018. 6. : 골목길 디자인사업 공사 발주

○2019. 1. : 골목마당 조성부지 건물 석면조사용역 완료

□ 향후계획

○2019. 상반기 : 골목마당 조성 완료

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 김수철(☎605-4616)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업의 조속추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1 ~ 2019. 12.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=545m, B=20~24m→40m

○ 착공일 : 2017. 12.

○ 준공일 : 2019. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,429백만원(보상 38,729, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	45,429	35,687	2,613	7,129
국 비	33,393	33,393
교 부 세
시 도 비	10,823	1,392	2,302	7,129
시군구비	1,213	902	311
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ▷ 2016년 투자심사 완료

○ 2016. 1~3월 : 지장물건 조사

○ 2016. 7~10월 : 보상협의

○ 2017. 6월 : 수용재결 보상금 지급 및 공탁

○ 2017. 12월 : 지장물 철거공사 착공

○ 2018. 12월 : 지장물 철거공사 준공

□ 향후계획

○ 2019.  5월 : 새싹로 확장 착공

○ 2019. 12월 : 새싹로 확장 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유): 해당없음

□ 사업변경 내역: 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

양정1동 주거지전용주차장 조성

담당자

주차관리과 김영지(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지 주변 주차장 절대 부족에 따른 주민불편 해소

○ 거주지 열악한 주차환경 개선으로 주민편의 증진 ※ 수혜도 : 8개통 10,000여명

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12 ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 양정동 506-6번지 일원

○ 규 모 : 904㎡,  지평식 주차 33면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,655백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,655	2,068	317	270
국 비
교 부 세
시 도 비	2,095	1,778	317	-
시군구비	560	290	-	270
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업비 확보 및 부지 매입)▷2016년 투자심사 완료

○ ‘16. 02.  유림아시아드 경계조정에 따른 인센티브(사업비) 신청(市 예산담당관)

○ ‘16. 12.  2016년 특별조정교부금 교부(450백만원)

○ ‘17. 03.  2017년 특별조정교부금 교부(1,700백만원)

○ ‘17. 06.  양정동 506-6번지 토지 등 3필지 773.5㎡ 매입

○ ‘18. 03.  양정동 506-22번지 토지 130.6㎡ 매입

□ 향후계획

○ ‘18. 10.   실시설계용역

○ ‘19. 01   공사발주        ○ ‘19. 05.   공사준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 사업 대상 부지매입비 상승 및 추가매입에 따른 공사비 부족과 부산진문화원

건립부지 협의 요청에 따른 사업잠정 중단

▷ 부산진문화원 건립 취소에 따라 ’19 본예산 별도 편성 후 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

가야유원지 주차장 조성

담당자

주차관리과 김영지(☎605-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가야유원지 주변 주차장 절대 부족에 따른 주민불편 해소

○ 주차장조성을 통한 유원지와 연계한 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6 ~ 2019. 6

○ 위 치 : 가야동 491-5번지 일원

○ 규 모 : 1,366㎡, 지평식 주차 41면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,011백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,011	64	1,826	121
국 비
교 부 세
시 도 비	1,408	45	1,278	85
시군구비	603	19	548	36
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80% ) ▷ 2016년 투자심사 완료

○ ‘16. 06.  가야유원지 주차장 조성사업 실시계획 인가 신청

○ ‘16. 12.  도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가 승인고시

○ ‘17. 04~12. 보상계획 열람공고(건설과) 및 편입물건 손실보상 협의(1.2.3차)

○ ‘18. 04~12. 편입물건 보상절차 이행(수용재결, 공탁 등)

○ ‘18.12.    공사 착공

○ ‘19.01.    공사 일시정지

□ 향후계획

○ ‘19.02.     공사 재개

○ ‘19.05.     공사 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 편입 부동산 세입자 미이주로 공사 중지 및 사업지연 우려

▷ 이주 독려 및 행정대집행 절차 검토

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

부산시민공원 주변 지중화사업

담당자

건설과 김정수(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민공원 북문 교차로 일원에 무분별하게 난립한 한전 및 통신선로를

지중화하여 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기  간: 2017년 ~ 2019년

○ 위  치: 연지동 시민공원 북문 교차로 일원

○ 규  모: 한전 및 통신선로 지중화 L=800m

○ 착공일: 2017년

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,000		1,200	800
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	2,000		1,200	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도:  55%) ▷ 2017. 투자심사 완료

○ ’17.  5월: 예산확보 2,000백만원(2017년 제1회 추경)

○ ’17.  8월: 한전 지중화사업 대상 확정

○ ’17. 12월: 통신선로 매설방식 협의

○ ’18.  4월: 협약 체결

○ ’18.  6월: 지중화사업비 우리구 분담금 집행완료(12억원)

○ ’18. 12월: 지중화공사 착공

□ 향후계획

○ ’19.  9월: 지중화 공사 완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당 없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

전포카페거리 공공디자인사업

담당자

창조도시과 오은경(☎605-5825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광객들을 위한 특색 있는 볼거리와 편의시설을 제공하여 관광편의 기능        을 확충하고 전포카페거리의 활성화를 추진

○ 가로환경 정비 및 디자인 조명, 편의시설 설치 등을 통해 전포카페거리의         특색을 자랑하는 테마거리를 조성하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위  치 : 전포대로209번길 일원(전포카페거리 일원)

○ 규  모 :

- 공공디자인사업 : A=90,000㎡, 마스터플랜 및 기본계획 수립, 시범거리 조성 등

- 지중화사업 : 지중화사업 L=250m 포설(6공), 맨홀 1개, 지상기기 3대 등

○ 착공일 : 2018. 6. 12.                ○ 준공일 : 2019. 2. 2.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원(통신사ㆍ한전 부담 1,000백만원 ※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,107		1,848	259
국 비
교 부 세	400		141	259
시 도 비
시군구비	919		919	-
지 방 채
민간자본
기 타	788		788	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%) ▷ 2017년 투자심사 완료

○ 2018. 1. 23. ~ 1. 30. : 지중화사업 대상지 확정(한전) 및 협약 체결(한전)

○ 2018. 3. 14. : 공공디자인 사업 입찰 공고

○ 2018. 6.  8. : 공공디자인 사업 계약 체결

○ 2018. 8. 10. ~ 10. 8. : 공공디자인 사업 착수보고회 및 중간보고회 개최

○ 2018. 11. ~ 12. : 지중화사업 통신사업자 협약 체결 및 사업비 교부

□ 향후계획

○ 2019. 2. : 공공디자인사업 공사 착공

○ 2019. 3. : 지중화사업 공사 착공

○ 2019. 3. ~ 6. : 공공디자인 사업 및 지중화사업 공사 준공

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

가야동 568-7번지 일원 도로개설

담당자

건설과 도성혁(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2005 ~ 2019

○ 위  치 : 부산진구 가야동 568-7번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=270m, B=8m

○ 착공일 : 2005. 01.

○ 준공일 :    -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도 이후
계	3,500	500	3,000
국 비
교 부 세	500	500
시 도 비
시군구비	3,000		3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %) ▷ 2017. 투자심사 완료

○ ‘17.12. : 특별교부세(5억원) 교부

○ ‘18. 1. : 본예산(22억원) 확보 및 실시설계용역 착수

○ ‘18. 4. : 실시설계용역 완료

○ ‘18. 6. : 보상협의

○ ‘18.11. : 2회추경(8억원) 확보

□ 향후계획

○ ‘19. 2. : 공사착공

○ ‘19.12. : 공사준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

가야2동 1통지내 도로개설

담당자

건설과 장성원(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2019년

○ 위  치 : 가야2동 동원로얄듀크 뒤편

○ 규  모 : 도로개설 L=160m, B=8m

○ 착공일 : ‘18. 9. 3.

○ 준공일 : ‘19. 6. 예정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,840	1,200	300	1,340
국 비
교 부 세
시 도 비	500	500
시군구비	2,340	700	300	1,340
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%) ▷ 2018. 투자심사 완료

○ ‘16.  9.   실시설계용역 완료

○ ‘16.  9.∼ 보상절차 이행

○ ‘18.  9.   착공

○ ‘18. 12.   보상협의 70% 완료

□ 향후계획

○ ‘19. 5. 보상협의(공탁 포함) 완료

○ ‘19. 6. 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

개금2동사 건립

담당자

개금2동 김현정(☎605-6907)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화 되고 협소한 동사를 넓고 쾌적한 환경을 갖춘 공공청사로 건립하여

효율적인 행정․복지 서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위  치 : 부산진구 개금동 633-5번지

○ 규  모 : 부지 662㎡, 건물 1,056㎡(지상3층)

○ 사업비 : 2,129백만원(건축비 2,080, 철거 49) ▷ 시비 400, 구비 1,729

□ 소요재원 및 사업비 집행현황                           (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	2,129	-	-	2,129
국 비
교 부 세
시 도 비	400	-	-	400
시군구비	1,729	-	-	1,729
지 방 채
민간자본
기 타

※ 향후 추가예산 확보 140백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ▷ 2017년 투자심사 완료

○ 2017.  7월  신축동사 건립계획 수립

○ 2017.  8월  부산시 지방재정 투자심사

○ 2017. 10월   2018년 본예산 확보 (※2019년도 명시이월)

- 확보예산 : 1,900백만원 ▷시비 400백만원, 구비 1,500백만원

○ 2018.  3월 : 공유재산(경로당, 창고) 매수 완료

○ 2018.  5월 : 신축부지 재산관리관 변경

○ 2018.  5월 : 신축부지 지적합병 완료

○ 2018.  5월 : 엄광경로당 대체 이전방안 검토 요청 ▷ 3회

※ 엄광경로당 협의 지연으로 동사신축 차질

○ 2019.  2∼6월 : 설계 용역

○ 2019.  3∼7월 : 대체 동사 확보 ▷ 새마을금고 예정

○ 2019.  8월 : 착공

○ 2020.  6월 : 준공  ※ 상기 추진일정은 여건에 따라 변동 가능

□ 향후계획

○ 설계용역으로 사업비 산출 후 예산 부족분은 추경예산 요청 확보

□ 문제점 및 대책

○ 엄광경로당 이전과 병행 추진

- 인근 국민주택 매입 후 대체 경로당 확보 ▷ 노인장애인복지과

□ 사업변경 내역

○ 지역과 어우러진 동사신축을 위한 설계용역 방법 다각적 검토 ▷ 공모 등

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

행복문화센터(개금3동사) 건립

담당자

개금3동 전재욱(☎605-6922)

□ 사업목적 및 필요성

○ 35년 이상되어 노후화된 동사를 행복문화센터로 건립하여 주민들에게

쾌적한 환경 조성 및 효율적 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 7월 ~ 2019년 말

○ 위  치 : 부산진구 개금동 428-8번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 517㎡, 건물 1,841㎡(지하1층, 지상5층)

○ 착공일 및 준공일 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 사업비 : 3,761백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,761		113	3,648
국 비	-
교 부 세	800			800
시 도 비	500		31	469
시군구비	2,461		82	2,379
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  3%) ▷ 2017년 투자심사 완료

○ 2017.  7월  신축 동사 건립계획 수립

○ 2017.  10월  부산시 지방재정 투자심사 승인(조건부)

○ 2018.  4월  부지 매입

○ 2019년 본예산 예산 편성 시 사업비 부족분 확보

□ 향후계획

○ 2019 상반기 동사 신축부지 용도변경 및 설계용역

○ 2019 하반기 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

○ 동사 신축부지 용도변경(제3종 일반주거지역 -> 준주거지역) 지연

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

백양대로68번길 일원 도로개설

담당자

건설과 김태훈(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2018.~2020.

○ 위  치: 당감동 백양대로68번길 일원

○ 규  모: 도로개설 L=150m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,500		2,000		1,500
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,500		1,000		1,500
지 방 채
민간자본
기 타	1,000		1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도:  15%) ▷ 2018. 투자심사 완료

○ ‘18.  5.: 구비 500백만 원 확보(2018 1회 추경)

○ ‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○ ‘18. 10.: 실시설계용역 완료

○ ‘18. 11.: 구비 500백만 원 확보(2018 2회 추경)

○ ‘18. 12.: 특별교부금 1,000백만 원 확보(2018 간주)

□ 향후계획

○ ‘19. 2.: 보상계획 열람공고 등 보상추진

○ ‘19. 8.: 도로개설공사 시행

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황                                    (2018.12.31. 기준)

사업명

당감동 725-1번지 일원 도로개설

담당자

건설과 손제황(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2018 ~ 2020

○ 위  치: 부산진구 당감4동 백양순환로 12~당감서로 63 일원

○ 규  모: 도로개설 L=295m, B=8m

○ 착공일: -

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	5,000		1,000	1,500	2,500
국 비
교 부 세
시 도 비	2,500			1,000	1,500
시군구비	2,500		1,000	500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 20%)

○ ‘18.  5.: 구비 1,000백만 원 확보(2018 1회 추경)

○ ‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○ ‘18. 12.: 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ ‘19. 1.: 구비 500백만 원 확보(2019 본예산)

○ ‘19. 2.: 감정평가 및 협의보상 추진

○ ‘19.12.: 공사 착공

○ ‘20. 6.: 공사 준공, 추가 예산확보 후 잔여구간 사업추진

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

10-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당사항 없음

우리 부산진구에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업 ▶ 해당사항 없음

우리 부산진구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.