109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
수정터널상부공간 연결사업	22,819	15,750	5,735	-	-	2019	2013	100
범천2 주거환경개선사업	4,899	3,408	858	633	-	2022	2014	62
가야2동 603번지 일원 도로개설	2,650	2.150	650	-	-	2019	2014	100
당감 행복한마을 만들기사업	3,319	2,716	503	100	-	2020	2014	90
당감동 동평상가아파트일원 도로개설	5,500	2,900	1,500	1,100		2020	2018	50
부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성	3,257	753	1,270	1,234		2020	2015	60
도시재정비촉진사업	45,429	37,113	8,316	-	-	2020	2016	72
양정1동 주거지전용주차장 조성	2,655	2,385	270	-	-	2019	2016	100
전포동~서면아파트일원 도로개설	2,500	850	1,650	-	-	2020	2016	40
당감동 백양순환로42번길 일원 도로개설	3,120	3,100	20	-	-	2019	2016	100
가야유원지 주차장 조성	2,135	1,622	513	-	-	2019	2016	100
부산시민공원 주변 지중화사업	2,000	1,178	822	-	-	2020	2017	95
전포카페거리 공공디자인사업	2,103	1,848	255	-	-	2020	217	80
가야동 568-7번지 일원 도로개설	4,400	4,000	-	-	-	2021	2017	20
가야2동 1통지내 도로개설	2,840	1,500	1,340	400	-	2019	2018	100
개금2동사 건립	2,946	446	544	1,956	-	2020	2017	10
행복문화센터 (개금3동사)건립	4,159	113	4	1,759	2,283	2021	2017	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
부암동 백양대로34번길 도로개설	2,900	400	1,000	1,056	444	2021	2017	27
백양대로68번길 일원 도로개설	3,500	2,000	1,500	-	-	2020	2018	43
당감동 725-1번지 일원 도로개설	5,000	1,000	2,500	-	1,500	2021	2018	25
가야1동 60-52번지 일원 도로개설	2,300	1,900	400	-	-	2020	2019	62
백양문예복합센터 건립	8,250	-	2,978	2,700	2,572	2021	2019	50
성지종합사회복지관 건립	7,750	-	30	2,120	5,600	2021	2019	10
당감생활문화센터 조성	1,920	-	-	1,420	500	2021	2019	0
새뜰마을사업 (다함께안창)추진	5,690	-	770	3,161	1,760	2022	2019	15
당감동 국민체육센터 건립	17,855	437	3,652	5,209	8,557	2022	2019	3
가남공영 주차장 증측	2,497	-	238	2,259	-	2020	2019	10
양정복합공공도서관 건립	5,463	-	-	2,864	2,599	2020	2019	10
전포2동 복합센터 건립	8,600	-	-	-	8,600	2022	2019	10
가야2동사 (청소년문화센터)건립	6,340	-	700	5,640	-	2020	2017	10
개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설	8,000	-	400	-	7,600	2021	2017	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘19년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

수정터널상부공간연결사업(완료)

담당자

도시재생과 김경희(☎605-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수정터널입구 상부에 인공지반을 조성하여 단절된 주민생활권을 연결하고       공원녹지를 확충하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014. ~ 2019.(6년)

○ 위  치 : 부산진구 관문대로 수정터널 입구

○ 규  모 : 9,000m²(L=180m, W=40 ~ 70m)

○ 내  용 : 인공지반(복개구조물), 커뮤니티센터, 공동체정원(녹지), 방음시설,

멀티프라자(놀이터, 주민운동시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,819백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	21,485	15,750	5,735				-
국 비	10,014	9,826	188				-
교 부 세
시 도 비	11,231	5,684	5,547				-
시군구비	240	240	-	-	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도시관리계획(공원)결정 및 공원조성계획 결정 용역 : 2015. 6. ~ 2016. 6.

○ 수정터널 주변도로정비공사 : 2015. 12. ∼ 2016. 4.

○ 도시계획시설사업 실시계획인가 고시 : 2016. 6. 22.

○ 전기, 토목공사 착공 : 2017. 5.

○ 하부도로공사 완료, 상부슬라브 콘크리트패널 설치 완료 : 2017. 12.

○ 건축공사 착공 : 2018. 5.

○ 토목공사 준공 : 2018. 6.

○ 건축공사 준공 : 2019. 1. (지상1층, 연면적 A=392.7㎡)

○ 조경공사 준공, 커뮤니티센터 리모델링 완료 : 2019. 6.

○ 사업 완료 및 준공식 개최 : 2019. 9.

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

범천2 주거환경개선사업

담당자

건축과 박희두(☎605-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역 개발여건 및 대상지 현황과 연계한 쾌적한 주거환경 조성

○ 주거의 안정성 및 편리성의 충족과 주거생활의 질적 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2022

○ 위 치 : 범천동 1123-24번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 3개소(B=8~12m, L=316m)

○ 착공일 : 2017. 12 / 준공일 : 2022. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,899백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	4,899	3,408	858	633
국 비	2,133	1,704	429
교 부 세
시 도 비	1,224.75	852	214.5	158.25
시군구비	1,541.25	852	214.5	474.75
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  62 %)

○ 2015 도활사업 공모 신청하여 2015 올해부터 연차별 예산 확보

○ 2015년 예산(국비 250, 시비 125, 구비 125)

○ 2016년 예산(국비 698, 시비 349, 구비 349)

○ 2017년 예산(국비 293, 시비 146.5, 구비 146.5)

○ 2018년 예산(국비 463, 시비 231.5, 구비 231.5)

○ 2018년 5월 : 사업시행변경인가

○ 2018년 6월 : 정비기반시설조성 사업비 926백만원 지원(구→LH)

○ 2019년 6월 : 정비기반시설조성 사업비 858백만원 지원(구→LH)

□ 향후계획

○ 2020. 하반기 : 공사 착공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유): 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 4,685백만원 ⇒ 변경 4,899백만원

○ 변경사유 : 2018년 인센티브 반영 [총214백만원 (국107 시53.5 구53.5)]

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가야2동 603번지 일원 도로개설

담당자

건설과 김수철(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미개설에 따른 주변 기개설도로와 비교 주민불만 해소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017~2019

○ 위  치 : 가야2동 603-2번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=145m, B=8m

○ 착공일 : 2019. 4 ~

○ 준공일 : 2019. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,650	2,150	650
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,650	2,150	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ ‘17. 9. 실시설계 용역완료 (L=145m, B=8m)

○ ‘17. 9.~‘19. 3. 보상협의

○ ‘19. 4. 공사착공

○ ‘19. 12. 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

당감 행복한 마을 만들기 사업

담당자

신용석(☎605-5825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 주거환경 정비를 통한 주거 인프라 확충

○ 다양한 지역자원들과 연계하여 주민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 공동       작업장 운영 등을 통한 경제적 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년~2020년

○ 위  치 : 당감1동 4통,5통,10통 / 0.42㎢

○ 내  용 : 골목길 정비사업, 마을인프라(주민쉼터, 경로당, 방재공원 등)

확충, 소단위 주거환경 정비사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,952백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	3,318.61	2,715.94	502.67	100
국 비	1,541.77	1,274.83	216.94	50
교 부 세
시 도 비	888.42	686.25	177.17	25
시군구비	888.42	754.86	108.56	25
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○2015. : 주민대학(1기) 운영, 백양대로60번가길 일원 도로정비공사

○2016. : 주민쉼터 및 방재공원준공, 도로정비공사 준공, 주민대학(2기) 운영

○2017. : 주민사랑방 준공, 행복드림센터 준공, 빛뜰(마을마당) 준공

○2018. : 슬레이트지붕 교체사업 완료, 주민인터뷰집 ‘당감’ 발간, 노후보안등 교체

○2019. : 골목마당 준공, 골목길디자인 사업 준공, 교통정온화사업 준공

□ 향후계획

○2020. 3. : 어르신 건강쉼터 조성완료

○2020. 8. : 공동체활성화 프로그램 용역 완료

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

당감동 동평상가아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 손제황(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 동평상가아파트 북측 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2015년~2021년

○ 위  치: 부산진구 동평로96번길 18(당감동) 일원

○ 규  모: 도로개설 L=220m, B=8m

○ 착공일: 2017. 12.(1차)

○ 준공일: 2018.  4.(1차)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	5,500	2,900	1,500	1,100
국 비
교 부 세	500	500
시 도 비	1,100	500		600
시군구비	3,400	1,400	1,500	500
지 방 채
민간자본
기 타	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 50%)

○ ’17. 12.: 1차 공사 착공(L=57m, B=8m)

○ ’18.  4.: 1차 공사 준공(L=57m, B=8m)

○ ’18. 12.: 실시설계용역(2차) 착수(L=163m, B=8m)

○ ’19.  5.: 도시관리계획(시설: 도로) 결정(변경)

○ ’19.  7.: 실시설계용역(2차) 완료 및 지장물 조사보고

○ ’19. 11.: 감정평가 실시(L=90m, B=8m)

□ 향후계획

○ ’20.  2.: 협의보상, 추후 예산확보에 따라 사업시행

□ 사업변경내역

○ 보상비 증액에 따른 총사업비 변경

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성사업

담당자

이창경(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반․편의시설이 부족하고 주거환경이 열악한 마을에 지역자원을 활용한

주민 주도형 마을재생 사업으로 추진으로 지역경제 활성화 및 주민들의

삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2019년

○ 위  치 : 부암동 690번지 일원

○ 규  모 : 68,000㎡

○ 주요사업내용 : 건강생활센터 조성, 벽화조성, 마을안길 정비, 셉테드 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,434백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	3,257.292	752.986	1,270.306	1,234.000
국 비	1,628.645	376.492	635.153	617.000
교 부 세
시 도 비	814.323	188.247	317.576	308.500
시군구비	814.323	188.247	317.576	308.500
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2016. 3. : 주민협의회 구성

○ 2016. 11. : 도시활력 증진지역 개발사업 변경 신청(1차)

○ 2017. 4. ~ 6. : 타당성 평가 용역

○ 2017. 7. ~ 2018. 4. : 도시활력 증진지역 개발사업 변경 신청(2~4차)

○ 2018. 5. : 도시활력 증진지역 개발사업 변경 조건부 승인(국토교통부)

○ 2018. 12. : 건강생활센터, 골목갤러리, 굴다리경관개선 사업 발주

○ 2019. 5. : 굴다리경관개선 사업 준공

○ 2019. 6. : 건강생활센터 및 골목갤러리 준공, 마을안길정비사업 설계용역

○ 2019. 8. : CCTV 및 그림자조명 설치

○ 2019. 10. : 마을안길정비사업 착공

□ 향후계획

○ 2020. 3. : 마을안길정비사업 준공

○ 2020. 6. : 방재공원, 쌈지공원 조성

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 박희두(☎605-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업의 조속추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1 ~ 2020. 12.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=545m, B=20~24m→40m

○ 착공일 : 2017. 12.

○ 준공일 : 2020. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,429백만원(보상 38,729, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	45,429	37,113	8,316
국 비	33,393	33,393
교 부 세
시 도 비	10,823	3,162	7,661
시군구비	1,213	558	655
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)

○ 2016. 1~3월 : 지장물건 조사

○ 2016. 7~10월 : 보상협의

○ 2017. 6월 : 수용재결 보상금 지급 및 공탁

○ 2017. 12월 : 지장물 철거공사 착공

○ 2018. 12월 : 지장물 철거공사 준공

○ 2019.  6월 : 문화재입회조사 완료 및 공사발주

○ 2019. 7월 : 새싹로 확장 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12월 : 새싹로 확장 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유): 해당없음

□ 사업변경 내역: 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

양정1동 주거지전용주차장 조성사업

담당자

주차관리과 김태훈(☎605-5884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양정동 일원 주거 밀집 지역 내에 주차장 조성으로 주차 공간 확충을 통한 주민 편의 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2016. 12.~ 2019. 5

○ 위  치: 양정동 506번지 일원

○ 규  모: 지평식 33면, A= 904.1㎡

○ 착공일: 2019. 2.

○ 준공일: 2019. 5.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,655백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,655	2,385	270	-	-	-	-
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	505	235	270	-	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타	2,150	2,068

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

❍ ‘16. 12. : 특별조정교부금 교부(4.5억원)

❍ ‘16. 12. : 공유재산심의회 심의 의결

❍ ‘17.  3. : 특별조정교부금 교부(17억원)

❍ ‘17.  5. : 제1차 추경 반영(특별조정교부금, 17억, 구비 3.5억원)

❍ ‘18.  1. : 실시설계용역 착수

❍ ‘18. 11. : 부지 추가매입에 따른 추가 실시설계 용역

❍ ‘19.  2. : 공사 착공

❍ ‘19.  5. : 공사 준공

□ 향후계획

- 해당사항 없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

전포동~서면아파트일원 도로개설

담당자

건설과 강시영(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진남로와 연결되는 서면아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2020년

○ 위  치 : 전포2동 산99-46번지, 33-351번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=180m, B=10m

○ 착공일 : 2016. 12.

○ 준공일 :

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,500	850	1,650
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,500	850	1,650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ‘18.  7.: 전포아파트 앞 토지 공탁

○ ‘19.  1.: 주차선 제거 및 차선도색(L=70m구간)

○ ‘19. 10.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ ‘20.  4.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 완료

○ ‘20.  6.: 도시관리계획 결정(변경) 및 공사 착공

○ ‘20. 10.: 공사 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

당감동 백양순환로42번길 일원 도로개설

담당자

건설과 손제황(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감4동 주민센터 일원 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2015년~2019년

○ 위  치: 당감동 699-94번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=157m, B=8m

○ 착공일: 2018.  1.

○ 준공일: 2019. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 3,120백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	3,120	3,100	20
국 비
교 부 세	300	300
시 도 비
시군구비	2,320	2,300	20
지 방 채
민간자본
기 타	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ ’18.  1.: 공사(1차 구간, L=60m) 착공

○ ’18.  5.: 공사(1차 구간, L=60m) 준공

○ ’18. 11.: 공사(2차 구간, L=97m) 착공

○ ’19.  3.: 도시관리계획(시설: 도로) 결정(변경)

○ ’19. 12.: 공사(2차 구간, L=97m) 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 [당초: 3,300백만원, 변경: 3,120백만원(감 180백만원)]

※ 사유: 잔여지 미매입에 따른 보상비 감액

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가야유원지 주차장 조성

담당자

주차관리과 강지은(☎605-5884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가야유원지 일원 내 주차장조성을 통한 주민불편사항 해소 및 유원지와 연계한 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기  간: 2016. 6. ~ 2019. 9.

○ 위  치: 가야동 491-5번지

○ 규  모: 지평식 41면, 부지면적 1,366㎡

○ 착공일: 2018. 12.

○ 준공일: 2019. 9.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,135백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,135	1,622	513		-	-	-
국 비
교 부 세
시 도 비	1,485	1,135	351		-	-	-
시군구비	650	487	163		-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

❍ ‘17. 4. : 보상계획 열람공고

❍ ‘18.12. : 공사 착공

❍ ‘19. 1. : 공사 중지(세입자 미이주)

❍ ‘19. 5. : 공사 재개

❍ ‘19. 9. : 공사 준공

❍ ‘19.10. : 주차장 개방 및 운영

□ 향후계획

- 해당사항 없음

□ 문제점 및 대책(부진사유)

- 해당사항 없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

부산시민공원 주변 지중화사업

담당자

건설과 이동하(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민공원 북문 교차로 일원에 무분별하게 난립한 한전 및 통신선로를

지중화하여 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기  간: 2017년~2019년

○ 위  치: 연지동 시민공원 북문 교차로 일원

○ 규  모: 한전 및 통신선로 지중화 L=800m

○ 착공일: 2018. 12.

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,000백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,000	1,178	822
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,000	1,178	822
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 95%)

○ ’17.  8.: 한전 지중화사업 대상 확정

○ ’18.  4.: 협약 체결

○ ’18.  6.: 지중화사업비 우리구 분담금 집행완료(1,178백만원)

○ ’18. 12.: 지중화공사 착공

○ ’19. 10.: 포장복구공사 완료

□ 향후계획

○ ’20.  6.: 전체 지중화사업 완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가야동 568-7번지 일원 도로개설

담당자

건설과 강시영(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2005 ~ 2021

○ 위  치 : 부산진구 가야동 568-7번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=270m, B=8m

○ 착공일 : 2005. 01.

○ 준공일 :

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	4,400	4,000		400
국 비
교 부 세	500	500
시 도 비	500	500
시군구비	3,400	3,000		400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ ‘18.  1.: 본예산(22억원) 확보 및 실시설계용역 착수

○ ‘18.  4.: 실시설계용역 완료

○ ‘18.  6.: 보상협의

○ ‘18. 11.: 2회추경(8억원) 확보

○ ‘19. 12.: 수용재결 보상완료(공탁)

□ 향후계획

○ ‘20.  3.: 일부구간 공사 발주

○ ‘20.  4.: 20년 제1회 추경예산 요청)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 수용재결 보상금 증액에 따른 예산(공사비)부족

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 기간: 당초 2005~2020, 변경 2005~2021

○ 총사업비: 당초 4,000백만원, 변경 4,400백만원

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가야2동 1통지내 도로개설

담당자

건설과 김수철(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2018년

○ 위  치 : 가야2동 동원로얄듀크 뒤편

○ 규  모 : 도로개설 L=160m, B=8m

○ 착공일 : ‘18. 9. 3.

○ 준공일 : ‘19. 4.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,840	1,500	1,340
국 비
교 부 세
시 도 비	500	500
시군구비	2,340	1,000	1,340
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘16.  9.   실시설계용역 완료

○ ‘16.  9.∼ ‘18. 8. 보상협의 완료

○ ‘18. 9. 공사착공

○ ‘19. 4. 공사준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

개금2동사 건립

담당자

개금2동 박병철(☎605-6907)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후하고 협소한 동사를 넓고 쾌적한 환경을 갖춘 공공청사로 건립하여

효율적인 행정․복지 서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위  치 : 부산진구 개금동 633-5번지

○ 규  모 : 부지 662㎡, 건물 999.91㎡(지하1층, 지상3층)

○ 착공일 : 2019.12.16.

○ 준공일 : 2020. 8.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,946백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도이후
계	2,946	446	544	1,956
국 비
교 부 세
시 도 비	400		400
시군구비	2,546	446	144	1,956
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017.  7월 : 신축동사 건립계획 수립

○ 2017.  8월 : 부산시 지방재정 투자심사

○ 2017. 10월 : 2018년 본예산(1,900백만원 ▷시400, 구1,500 ※2019년 명시이월)

○ 2018.  3월 : 공유재산(경로당, 창고) 매수 완료 ▷ 446백만원

○ 2018.  5월 : 신축부지 재산관리관 변경, 지적합병 완료

○ 2019.  3월 : 엄광경로당 이전 예산(1회 추경, 100백만원) 확보 ▷ 노인장애인복지과

○ 2019. 3∼8월 : 설계용역 계약 및 완료

○ 2019.  7월 : 공사비 예산 추가 확보(2회 추경, 600백만원 ※2020년 명시이월)

○ 2019.  9월 : 건축승인

○ 2019. 10월 : 임시동사 및 엄광경로당 이전

○ 2019. 11월 : 기존동사 및 엄광경로당 철거 완료

○ 2019. 12월 : 공사착공 및 기공식 개최

□ 향후계획

○ 2020.  8월 : 준공

□ 문제점 및 대책 : 없음

□ 사업변경 내역 : 없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

행복문화센터(개금3동사) 건립

담당자

개금3동 유하늘(☎605-6932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 35년 이상되어 노후화된 동사를 행복문화센터로 건립하여 주민들에게 쾌적한 환경 조성 및 효율적 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 7월 ~ 2021년

○ 위  치 : 부산진구 개금동 428-8외 1필지

○ 규  모 : 부지 517㎡, 연면적 1,611.51㎡(지하1층, 지상5층)

○ 착공일 및 준공일 : 2020년 6월 착공(예정), 2021년 3월 준공(예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 사업비 : 4,159백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	‘18연도	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도 이후
계	4,159		113	4	1,759	2,283
국 비
교 부 세	800				800
시 도 비	500		31	2	467
시군구비	2,859		82	2	492	2,283
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017년 07월 : 신축 동사 건립계획 수립

○ 2017년 10월 : 부산시 지방재정 투자심사 승인(조건부)

○ 2018년 04월 : 부지 매입(113백만원)

○ 2019년 08월 : 설계용역 착수(146백만원)

○ 2019년 09~12월 : 부지경계측량, BF예비인증 수수료, 석면조사 용역(4백만원)

○ 2019년 12월 : 도시관리계획 용도지역 변경 완료(제3종일반주거➝준주거)

□ 향후계획

○ 2020년 1월 : 설계용역 완료

○ 2020년 6월 공사착공(예정) 및 2021년 3월 공사준공(예정)

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 사업기간/총사업비 : (당초) 2017~2019/ 3,761백만원 ➝ (변경) 2017~2021/ 4,159백만원

○ 변경사유 : 공사비 기준단가 인상 반영 [총398백만원(전액 구비)]

※ ｢공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인｣에 따라 산정 : (당초) 1,970천원/㎡ ➝ (변경) 2,569천원/㎡

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

부암동 백양대로34번길 도로개설

담당자

건설과 김소연(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2018년~ 2021년

○ 위  치: 부산진구 부암동 백양대로34번길 일원

○ 규  모: 도로개설 L=220m, B=6~8m

○ 착공일: -

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,900	400	1,000	1,056	444
국 비	1,450	200	500	528	222
교 부 세
시 도 비	725	100	250	264	111
시군구비	725	100	250	264	111
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 27%)

○ ’17. 12.: 주한미군 공여구역 주변지역 지원 사업 선정

○ ’19.  3.: 1차 구간 감정평가

○ ’19.  5.: 1차 구간 보상협의

○ ’19. 12.: 수용재결

□ 향후계획

○ ’20.  3.: 1차 구간(L=100m) 공사 착공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

백양대로68번길 일원 도로개설

담당자

건설과 김소연(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 백양대로 연결 구간 및 당감시장 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2018년~2020년

○ 위  치: 당감동 백양대로68번길 일원

○ 규  모: 도로개설 L=150m, B=8m

○ 착공일: -

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	3,500	2,000	1,500
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,500	1,000	1,500
지 방 채
민간자본
기 타	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 43%)

○ ’18. 10.: 실시설계용역 완료

○ ’19.  6.: 1구간 감정평가

○ ’19. 11.: 수용재결 신청

□ 향후계획

○ ’20.  1.~: 잔여구간 감정평가 실시 및 보상협의

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

당감동 725-1번지 일원 도로개설

담당자

건설과 손제황(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 동평초등학교 남측 일원의 도시기반시설 도로를 확충하여

지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2018년~2021년

○ 위  치: 부산진구 당감4동 백양순환로 12~당감서로 63 일원

○ 규  모: 도로개설 L=295m, B=8m

○ 착공일: -

○ 준공일: -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 5,000백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	5,000	1,000	2,500		1,500
국 비
교 부 세
시 도 비	1,500				1,500
시군구비	3,500	1,000	2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 25%)

○ ’18. 12.: 실시설계용역 완료

○ ’19.  5.: 감정평가(1차) 및 협의보상 추진

○ ’19. 11.: 지장물조사보고(2-1차) 완료

□ 향후계획

○ ’20.  1.: 수용재결 감정평가(1차)

○ ’20.  6.: 1차 공사 착공(L=160m)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가야1동 60-52번지 일원 도로개설

담당자

건설과 김수철(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년 ~ 2019년

○ 위  치 : 부산진구 가야1동 60-52번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=70m, B=8m

○ 착공일 : ‘19. 11.

○ 준공일 : ‘20. 06.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,300	1,900	400
국 비
교 부 세
시 도 비
시군구비	2,300	1,900	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

○ ‘18.  1. : 2018년 본예산 19억 확보

❍ ‘19.  6. : 2회추경 예산확보(300백만원)

❍ ‘19. 10. : 보상협의 90% 완료

❍ ‘19. 11. : 3회추경 예산확보(100백만원)

❍ ‘19. 11. : 공사착공

□ 향후계획

○ ‘20. 6. : 공사준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

백양 문예복합센터 건립

담당자

행정7급 이종광(☎605-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부암·당감권역 내에 주민들을 위한 문화·예술 공간이 전무하여 거점시설 역할을       하는 문화예술복합센터를 건립하여 지역주민들의 문화·예술·여가 활동공간 마련       및  활성화를 도모할 수 있는 기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1 ~2021. 8

○ 위  치 : 부산진구 부암동 507-2 외 5필지

○ 규  모 : 부지 991㎡, 지상6층, 연면적 2,100㎡

○ 착공일 : 2020. 8월 계획

○ 준공일 : 2021. 8월 계획

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	8,250		2,978	2,700	2,572
국 비
교 부 세
시 도 비	2,525			1,200	1,325
시군구비	5,725		2,978	1,500	1,247
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   50%)

○ 2019. 12  사업부지 매입완료

□ 향후계획

○ 2020. 2  석면조사 및 철거, 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2020. 3  공공건축 기획 심의(부산시), 건물철거, 지반조사

○ 2020. 4  실시설계 발주

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ (문제점) ‘건축서비스산업진흥법’ 개정으로 공공건축 사업절차 추가 이행

○ (대  책) 공공건축부서 및 부산시에 신속한 심의이행 요구(독촉)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

(가칭)성지종합사회복지관 건립

담당자

희망복지과 조애정(☎605-4314)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복지관의 혜택에서 소외된 연지·초읍 지역의 복지수요 충족

○ 지역주민에 대해 종합적인 복지서비스 제공 및 잘사는 행복도시 여건 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2021년(3년)

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 산 70-1번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 8,076㎡, 건물 2,034㎡(지하1층, 지상4층)

○ 착공일 및 준공일 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	7,750		30	2,120	5,600
국 비
교 부 세	1,000			1,000
시 도 비	2,800				2,800
시군구비	3,950		30	1,120	2,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018년 09월 : (가칭)성지종합사회복지관 건립기본계획 수립

○ 2018년 11월 : 공유재산심의회 및 구 중기지방재정계획 반영

○ 2019년 1월~12월 : 복지관 부지배입비 등 건립예산 확보 및 편성

○ 2019년 12월 : 도시관리계획(초연공원 조성계획) 변경(결정) 및 실시설계 용역 추진

○ 2020년 1월 : 부산광역시 도시공원위원회 심의 의결(조건부)

□ 향후계획

○ 2020년 02월 : 도시관리계획 실시계획 인가 신청(토지보상)

○ 2020년 03월 : 중앙토지수용위원회 의견협의 자료 제출

○ 2020년 06월 : 부지매입 절차 추진

○ 2020년 ~ 2021년 : 설계용역 입찰 및 추진, 공사계약 및 착공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 개정관련으로 추진 불가

○ 복지관 신축 부지 조성계획 변경 등 사전절차 추진으로 지연

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

당감 생활문화센터 조성

담당자

행정7급 이종광(☎605-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 생활문화욕구 충족 및 동아리 활성화를 위한 주민자율공간 조성

○ 청소년들의 꿈과 창의적 사고를 펼칠 수 있는 독립공간 마련 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1 ~2021. 4

○ 위  치 : 부산진구 당감동 751-3

○ 규  모 : 부지 249㎡, 지상4층, 연면적 543.28㎡

○ 착공일 : 2020. 8월 계획

○ 준공일 : 2021. 4월 계획

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	1,920			1,420	500
국 비	900			900
교 부 세
시 도 비	900			500	400
시군구비	120			20	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   0%)

○ 2019. 12  사업예산 확보

□ 향후계획

○ 2020. 2  석면철거, 공공건축 기획 심의

○ 2020. 3  건물철거, 지반조사

○ 2020. 4  실시설계 발주

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ (문제점) ‘건축서비스산업진흥법’ 개정으로 공공건축 사업절차 추가 이행

○ (대  책) 공공건축부서 및 부산시에 신속한 심의이행 요구(독촉)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

새뜰마을사업「다함께안창」추진

담당자

신용석(☎605-5825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 열악한 주거환경 및 생활 인프라를 개선하고 주민 공동체 활동지원 등을       통해 쇠퇴하는 마을 재생 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019 ~ 2022

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 1544-54번지 일원

○ 규  모 : A=81,094㎡

○ 내  용 : 골목길 정비, 셉테드, 커뮤니티시설 조성, 노후주택 개보수, 주민                역량강화 및 공동체 활성화 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	5,690		770	3,161	620	1,140
국 비	3,983		600	2,151	434	798
교 부 세
시 도 비	512			354	56	102
시군구비	1,195		170	656	130	239
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2019.  4. : 2019 도시 새뜰마을사업 공모 신규 대상지 선정

○ 2019. 10. : 사업 총괄코디네이터 위촉

○ 2019. 11. : 사업 마스터플랜 수립용역 착수 및 사업추진협의회 구성

○ 2019. 12. : 주민커뮤니티시설 및 마을주차장 조성예정부지 매입 완료

□ 향후계획

○ 2020. 상반기 : 고령자 배려 골목길 정비 완료

○ 2020. 하반기 : 사업마스터플랜 및 실시설계용역 완료, 폐공가 정비,

집수리 지원사업 추진

○ 2021. 2. : 주민커뮤니티시설 및 마을주차장 준공

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

“가칭”당감동 복합 국민체육센터

담당자

문화체육과 박옥선(☎605-4092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집 지역인 당감동에 체육시설)을 건립하여 권역별 균형있는 생활체육 활성화를 도모하고, 다양한 연령층의 수요에 부응하는 생활밀착형 체육시설을 확충

□ 사업개요

○ 기  간 :  2019.7~2022.7

○ 위  치 :  당감동 257-16번지 외 7필지

○ 규  모 :  지하3층 지상6층(연면적 6,570㎡)

○ 착공일 :  2020.12월

○ 준공일 :  2022.06월

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,855백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	17,855	437	3,652	5,209	8,557
국 비	5,000		1,000	1,700	2,300
교 부 세
시 도 비	3,333				3,333
시군구비	9,522	437	2,652	3,509	2,924
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ ‘19. 3 : 생활밀착형 국민체육센터 공모사업신청 확정(단일형)

○ ‘19.10 : 생활SOC복합 국민체육센터 사업 선정(복합형)

○ ‘19.12 : 부지매입

○ ‘20. 2 : 공공건축 심의

□ 향후계획

○ 2020.02~11 : 설계공모 및 실시설계

○ 2020.12    : 공사계약 및 착공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 공공건축 심의절차 이행중, 설계공모등 절차 이행후 착공

○ 심의절차 신속 이행 및 설계기간 최대한 단축

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가남공영주차장 증축사업

담당자

주차관리과 강지은(☎605-5884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가야1동 고지대 산복도로 주차공간 절대 부족에 따른 확충

○ 주차공간 확충을 통한 주차환경개선으로 주민편의 증진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019. 01. ~ 2020. 10.

○ 위  치 : 부산진구 가야동 8-6번지 일원

○ 규  모 : 철골식 3층 4단 130면, 부지면적 1,540.13㎡

○ 착공일 : 2020. 01. 20.

○ 준공일 : 2020. 10. 15.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,497백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	2,497		238	2,259
국 비	870			870
교 부 세
시 도 비	350		238	112
시군구비	1,277			1,277
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 09. : 공유재산심의회(변경) 심의 원안 가결

○ 2019. 10. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 11. : 계약심사 및 건축허가

□ 향후계획

○ 2020. 01. : 가남공영주차장 증축사업 및 감리용역 착공

○ 2020. 10. : 가남공영주차장 증축사업 및 감리용역 준공

□ 문제점 및 대책

○ 공사기간동안 주거지주차장 이용객 차량 불법주차 발생에 따른 단속자제

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

양정복합공공도서관 건립

담당자

권인엽(☎605-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육과 보육을 함께 영위하는 지역 문화공동체 커뮤니티 시설 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

○ 위  치 : 부산진구 양정동 506-6

○ 규  모 : 부지 904.1㎡, 연면적 1,860㎡, 지상 1~5층

○ 착공일 : 2020. 11월경

○ 준공일 : 2020. 12월경

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	5,463			2,864	2,599
국 비
교 부 세	2,579			843	1,736
시 도 비	1,284			421	863
시군구비	1,600			1,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 생활SOC 복합화 사업 ‘양정복합공공도서관 건립’ 선정

○ 인근 부동산 매입 추진 중

□ 향후계획

○ 설계 공모 및 설계 용역 실시

○ 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 인근 부동산 매입, 소유자와 협의 중

□ 사업변경 내역 : 해당없음

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

전포2동 복합센터 건립

담당자

박병철(☎605-4115)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현동사가 노후(1989년 건립)·협소하여 편의시설이 부족하고 주민불편이 큼

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ∼ 2022년

○ 위  치 : 전포동 175-26번지외 1필지

○ 규  모 : 지하2층/지상4층, 부지 605㎡, 연면적 2,687㎡

○ 착공일 : 2021년 상반기

○ 준공일 : 2022년 상반기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,947백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	8,947				8,947
국 비	1,184				1,184
교 부 세
시 도 비	354				354
시군구비	7,409				7,409
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 생활SOC사업 선정(2019.9.) : 동주민센터, 주거지주차장, 작은도서관

○ 생활문화센터 SOC사업  추가 선정

○ 매입 추진한 사유지 사유자가 매매의사를 철회하여 대체부지 검토 중

□ 향후계획

○ 복합동사 건립에 적정한 대체부지 적극 물색

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 인접 사유지 소유자가 매매의사를 철회함에 따라 공사 추진이 중지됨

○ 부지 확보시 빠른 시일내 사업 진행

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

가야2동사(청소년 문화센터)건립

담당자

정성희(☎605-6848)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화 되고 협소한 가야2동사와 청소년 문화센터를 복합시설로 건립하여 지역 주민에게 쾌적한 환경과 효율적인 행정서비스를 제공하고, 청소년에게 안전하고 건강한 성장을 지원하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년~2020년

○ 위  치 : 부산진구 가야동 519-1번지

○ 규  모 : 부지 810㎡, 건물 1,683㎡(지하1층, 지상5층)

○ 착공일 : 2020년

○ 준공일 : 2020. 12월 예정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,340 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	6,340		700	5,640
국 비	1,700			1,700
교 부 세
시 도 비	116			116
시군구비	4,524		700	3,824
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017년 07월 : 청소년문화센터(가야2동 복합동사) 건립 계획 수립

○ 2017년 10월 : 부산시 지방재정투자심사

○ 2017년 10월 : 2018년 본예산 확보(※2019년도 명시이월)

-확보예산: 700백만원 ▷ 구비 700백만원

○ 2018년 10월 : 청소년 문화센터 건립비 2019년 본예산 확보(여성아동가정과)

-확보예산: 1,932백만원 ▷ 국비 1,700백만원 시비 116백만원 구비 116백만원

○ 2019년 03월 : 가야2동사(청소년문화센터) 신축부지 매입 추진현황 보고

▷ 부지변경 : 현 동사 인근 사유지 매입 ⇨ 가야동 519-1번지

○ 2019년 07월 : 가야2동사(청소년문화센터) 건립관련 주민설명회 개최

○ 2019년 10월 : 2020년 본예산 확보

-확보예산: 1,900백만원  ▷구비 1,900백만원

□ 향후계획

○ 2020년 1월 : 사업부지 매입(가야동 519-1, 810㎡, 1,817백만원)

○ 2020년 2월 : 공공건축물 사전 검토

○ 2020년 2월~3월 : 건물 철거

○ 2020년 2월~5월 : 설계용역 완료 및 공사비 예산 확보(1차 추경:1,808백만원)

○ 2020년 6월 : 착공

○ 2020년 12월 : 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 건축서비스산업진흥법 시행령 개정으로 사업계획 사전검토 및 공공건축심의       대상으로 착공시기 지연 우려

□ 사업변경 내역

당초 사업(현 동사부지에 동사건립)	변경된 사업(신규매입부지에 동사 건립)
사업위치 : 부산진구 가야2동 601-7 외 4필지 사 업 량 : 부지 889㎡,, 연면적 1,320㎡ 총사업비 : 3,557백만원	사업위치 : 부산진구 가야동 519-1번지 사 업 량 : 부지 810㎡, 연면적 1,683㎡ 총사업비 : 6,340백만원

투자심사 사업 추진현황

(2019.12.31. 기준)

사업명

개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설

담당자

건설과 박지혜(☎605-4705)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

○ 도시기반시설 확충으로 주택가 이면도로 확보

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019 ~ 2021

○ 위  치 : 개금3동 가야대로507번가길 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=654m, B=8~10m

○ 착공일 : -

○ 준공일 : -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘19연도	‘20연도	‘21연도	‘22연도	‘23연도 이후
계	8,000		400		2,600	5,000
국 비	4,000		200		1,300	2,500
교 부 세
시 도 비	2,000		100		650	1,250
시군구비	2,000		100		650	1,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

❍ ‘19.  1. : 실시설계용역 착수

❍ ‘19.  8. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

❍ ‘20.  1. : 실시계획 고시

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 2020년 상반기 집행 후 잔액 135백만원으로, 추가 예산 확보 시 1차 실시계획고시 된 잔여 1필지에 대하여, 협의 보상으로 636백만원 지출 가능

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업 ▷ 해당사항 없음

우리 부산진구에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업 ▷ 해당사항 없음

우리 부산진구에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.