109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
범천2동주거환경 개선사업	4,899	4,266	633	0	0	2023	2014	70
부암3동~당감1동간도로개설사업	4,800	3,300	1,500	0	0	2021	2011	70
당감행복한마을 만들기사업	3,672	3,572	100	0	0	2020	2014	100
당감1동 동평로 116번길 도로개설	2,700	2,700	0	0	0	2020	2014	100
범천동동일@일원 도로개설	6,040	2,040	0	2,000	2,000	2022	2014	43
가야2동143번지 일원 도로개설	2,400	2,400	0	0	0	2020	2016	100
당감동동평상가@ 일원 도로개설	6,000	4,400	800	0	800	2022	2018	60
부암동 철길마을 메디컬빌리지조성	3,434	2,203	925	306	0	2021	2015	91.07
도시재정비촉진 사업지원(새싹로)	45,429	45,429	0	0	0	2021	2016	75
전포동~서면@일원 도로개설	3,200	2,500	0	700	0	2021	2016	50
부산시민공원주변 지중화사업	2,000	2,000	0	0	0	2020	2017	100
가야동568-7번지 일원 도로개설	4,800	4,000	800	0	0	2021	2017	50
개금2동사 건립	2,904	1,044	1,860	0	0	2020	2017	100
행복문화센터 (개금3동사)건립	4,239	117	1,419	2,703	0	2021	2018	10
부암동 백양대로 34번길 도로개설	2,900	1,400	1,056	444	0	2021	2017	50
백양대로68번길 일원 도로개설	4,140	3,500	640	0	0	2021	2018	60

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
당감동725-1번지 일원 도로개설	5,000	3,500	0	300	1,200	2022	2018	40
가야1동60-52번지 일원 도로개설	2,300	1,900	400	0	0	2020	2019	100
범천4동1104번지 일원 도로개설	2,800	2,800	0	0	0	2022	2018	20
당감동동평로73번길41 일원 도로개설	3,900	2,000	0	420	1,480	2021	2018	30
당감동당감로25번길 일원 도로개설	5,800	2,000	400	0	3,400	2022	2018	25
백양문예복합센터 건립	9,050	2,977	294	5,779	0	2021	2019	60
(가칭)성지종합 사회복지관 건립	12,192	0	2,143	6,860	3,189	2022	2019	10
당감생활문화센터 조성	1,920	0	1,543	377	0	2021	2019	70
동평중 개방형 다목적체육관건립	3,956	0	3	3,448	505	2022	2019	20
새뜰마을사업 (다함께안창)추진	5,690	1,884	2,046	1,050	710	2022	2019	17
(가칭)당감동 복합 국민체육센터건립	18,761	5,140	5,209	8,412	0	2022	2019	17.6
가야1동256-13번지 일원 도로개설	1,600	0	30	1,570	0	2022	2019	5
당감동689번지 일원 도로개설	5,900	50	0	2,000	3,850	2022	2019	30
커뮤니티하우스 ‘도란도란’건립	2,874	397	804	1,673	0	2021	2019	65
전포 어울더울 복합문화센터건립	2,287	0	0	2,287	0	2022	2019	5
가남공영주차장 증축사업	2,389	239	2,150	0	0	2020	2019	100
양정복합 공공도서관 건립	5,463	363	2,080	3,020	0	2021	2019	10
전포2동 복합센터 건립	4,377	0	0	4,377	0	2022	2019	10
당감복합 공공도서관 건립	5,900	0	0	3,687	2,213	2022	2019	5
가야2동사 건립 (청소년문화센터)	6,940	2,078	4,262	600	0	2021	2017	0
개금3동가야대로 507번가길 일원 도로개설	8,000	33	350	1,658	5,958	2022	2017	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
전포2동밭개마을 새뜰마을 사업	5,750	0	187	1,704	3,859	2023	2020	15
재활용선별장 시설 현대화사업	5,932	0	0	0	5,932	2025	2020	0
가야1동60-11번지 일원 도로개설	2,900	0	1,186	1,714	0	2022	2020	95
부암동670-9번지 일원 도로확장	2,300	0	50	2,250	0	2022	2020	5
전포로(路)!문화로(路)!놀로WOW~	180	0	0	180	0	2021	2020	0
삶의불빛을잇다. 호천르네상스 (도시재생뉴딜사업)	28,477	0	0	2,070	26,407	2024	2020	0
부산진지역자활 센터 매입 이전	2,750	0	0	2,750	0	2021	2020	0

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

범천2 주거환경 개선 사업

담당자

건축과 송명규(☎605-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역 개발여건 및 대상지 현황과 연계한 쾌적한 주거환경 조성

○ 주거의 안정성 및 편리성의 충족과 주거생활의 질적 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2023

○ 위 치 : 범천동 1123-24번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 3개소(B=8~12m, L=316m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,899백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,899	4,266	633
국 비	2,133	2,133
시 도 비	1,224.75	1,066.5	158.25
시군구비	1,541.25	1,066.5	474.75
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70 %)

○ 2015 도활사업 공모 신청하여 2015 올해부터 연차별 예산 확보

○ 2015년 예산(국비 250, 시비 125, 구비 125)

○ 2016년 예산(국비 698, 시비 349, 구비 349)

○ 2017년 예산(국비 293, 시비 146.5, 구비 146.5)

○ 2018년 예산(국비 463, 시비 231.5, 구비 231.5)

○ 2018년 5월 : 사업시행변경인가

○ 2018년 6월 : 정비기반시설조성 사업비 926백만원 지원(구→LH)

○ 2019년 6월 : 정비기반시설조성 사업비 858백만원 지원(구→LH)

○ 2020년 2,12월 : 정비기반시설조성 사업비 633백만원 지원(구→LH)

□ 향후계획

○ 2023. 상반기 : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 4,685백만원 ⇒ 변경 4,899백만원

○ 변경사유 : 2018년 인센티브 반영 [총214백만원 (국107 시53.5 구53.5)]

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

부암3동～당감1동간 도로개설 사업

담당자

건설과 김소연(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동, 부암동 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2005 ~ 2021

○ 위  치: 부암동 387-2번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=200m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	3,300	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	4,800	3,300	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `19. 12.: 보상 완료(1차)

○ `20.  2.: 협의보상 실시(2차)

○ `20.  6.: 수용재결 신청(2차)

○ `20.  7.: 공사 착공

○ `20.  9: 수용재결 완료(2차)

□ 향후계획

○ `21. 8.: 공사 준공 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감 행복한 마을 만들기 사업

담당자

도시재생과 주송진(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 주거환경 정비를 통한 주거 인프라 확충

○ 다양한 지역자원들과 연계하여 주민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 공동

작업장 운영 등을 통한 경제적 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년~2020년

○ 위  치 : 당감1동 4통,5통,10통 / 0.42㎢

○ 내  용 : 골목길 정비사업, 마을인프라(주민쉼터, 경로당, 방재공원 등)

확충, 소단위 주거환경 정비사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,672백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,672.34	3,572.37	99.97
국 비	1,836.44	1,786.45	49.99
시 도 비	917.95	892.96	24.99
시군구비	917.95	892.96	24.99
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행잔액 279,655,270원 - 반납액 156,890,620원 [국 139,568,020 / 시 17,322,600]

- 불용액 122,764,650원 [특교금 52,721,010 / 구 70,043,640]

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○2015. 6. ∼ 2016.  7. : 생활인프라 확충시설 조성부지 매입 완료

○2016. : 주민쉼터 준공, 방재공원 2개소 준공, 도로정비공사 준공

○2017. : 주민사랑방 준공, 행복드림센터 준공, 빛뜰(마을마당) 준공

○2018. 06. : 골목길 디자인사업 공사 발주

○2018. 12. : 슬레이트 지붕 교체사업 완료(77세대), 마을책자 ‘당감’ 발간

○2019. 06. : 골목마당 설계용역 착수

○2019. 12. : 마을 정온화 사업 실시

○2020. 01. ~ 10. : 공동체활성화 프로그램 운영

□ 향후계획 : 2020. 11 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감1동 동평로116번길 도로개설

담당자

건설과 장효진(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감1동 동평로116번길 (동일2차아파트 서측) 구간의 도시기반시설 도로를

확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2017년~2020년

○ 위  치: 당감1동 동평로116번길 동측 일원

○ 규  모: 도로개설 L=150m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,700	2,700
국 비
시 도 비	500	500
시군구비	1,000	1,000
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	1,200	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ ’17. 10.: 실시설계용역 완료

○ ’19. 12.: 공사착공

○ ’20. 12.: 공사준공

□ 향후계획

○ ’21. 1. ~ 2.: 지적확정측량 후 도로사용개시 공고

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

범천동 동일아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 노치민(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동일아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014년~2022년 이후

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 동일아파트 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=240m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,040	2,040		2,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	6,040	2,040		2,000	2,000
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ ‘16.11. : 1차공사(지장물 철거 4동) 준공

○ ‘17. 7. : 2차공사(도로개설 L=18m) 준공

○ ‘18.10. : 3차공사(도로개설 L=100m) 준공

○ ‘19. 3.~‘20. 5. : 실시설계용역(수탁공사추진을 위하여 타절정산)

○ ‘20. 6. : 실시계획변경고시(전구간 고시) 및 보상협의(한국철도시설공단)

□ 향후계획

○ 미개설구간 보상 및 도로개설 시행 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가야2동143번지 일원 도로개설

담당자

건설과 박상준(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개금롯데캐슬 입주 후 교통수요 증가에 따른 도로망확충

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015 ~ 2020

○ 위  치 : 가야대로507번길 6-9 주변

○ 규  모 : 도로개설 L=65m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,400	2,400
국 비
시 도 비	400	1400
시군구비	300	300
지 방 채
민간자본	1,300	1,300
기타(교부세)	400	400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘19. 12.: 보상완료

○ ‘20.  2.: 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘20.  8.: 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감동 동평상가아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 윤항재(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2015. ~ 2022.

○ 위  치: 부산진구 동평로96번길 18(당감동) 일원

○ 규  모: 도로개설 L=220m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	4,400	800		800
국 비
시 도 비	500	500
시군구비	5,000	3,400	800		800
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 60%)

○ `17. 12.: 1차 공사 착공(L=57m, B=8m)

○ `18.  4.: 1차 공사 준공(L=57m, B=8m)

○ ‘19.  5.: 도시관리계획(시설: 도로) 결정(변경)

○ ‘19.  7.: 실시설계용역(2차) 완료

○ ‘20.  3.: 동평상가 구조안전진단용역 착수

○ ‘20.  5.: 도시관리계획(시설: 도로) 결정(변경)

○ ‘20.  6.: 동평상가 구조안전진단용역 완료 및 실시계획 고시

□ 향후계획

○ ‘21. 4.: 2차 공사 착공(L=163m)(예산 확보 시)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성

담당자

도시재생과 이창경(☎605-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반․편의시설이 부족하고 주거환경이 열악한 마을에 지역자원을 활용한

주민 주도형 마을재생 사업으로 추진으로 지역경제 활성화 및 주민들의

삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2021년

○ 위  치 : 부암동 690번지 일원

○ 규  모 : 68,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,434백만원(※사업비 불용액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,434	2,202.8	924.8	306.4
국 비	1,717	1,101.4	462.4	153.2
시 도 비	858.5	550.7	231.2	76.6
시군구비	858.5	550.7	231.2	76.6
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 91.07%)

○ 2018. 5. : 도시활력 증진지역 개발사업 변경 조건부 승인(국토교통부)

○ 2018. 12. : 건강생활센터, 골목갤러리, 굴다리경관개선 사업 발주

○ 2019. 5. : 굴다리경관개선 사업 준공

○ 2019. 6. : 건강생활센터 및 골목갤러리 준공, 마을안길정비사업 설계용역

○ 2019. 8. : CCTV 및 그림자조명 설치

○ 2019.10. ~ 2020.3. : 마을안길정비사업 시행

○ 2020. 5. ~ 11. : 보행환경개선사업 시행

○ 2020. 6. ~ 12. : 쌈지(방재)공원 조성

□ 향후계획

○ 2021. 1.~3 : 아름다운 마음길 조성

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 송명규(☎605-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업의 조속추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1 ~ 2021. 4.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=380m, B=20~24m→40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,429백만원(보상 38,729, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	45,429	45,429
국 비	33,393	33,393
시 도 비	10,823	10,823
시군구비	1,213	1,213
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2016. 1~3월 : 지장물건 조사

○ 2017.  6월 : 보상완료

○ 2017. 12월 : 지장물 철거공사 착공

○ 2018. 12월 : 지장물 철거공사 준공

○ 2019.  6월 : 문화재입회조사 완료 및 공사발주

○ 2019.  7월 : 새싹로 확장 착공

○ 2020. 11월 : 공사 부지 내 오염토 정화 완료

□ 향후계획

○ 2021.  5월 : 새싹로 확장 준공 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

전포동∼서면아파트일원 도로개설

담당자

건설과 박상준(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진남로와 연결되는 서면아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2021년

○ 위  치 : 전포2동 산99-46번지, 33-351번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=180m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,200	2,500		700
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	2,500		700
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘19.  1.: 주차선 제거 및 차선도색(L=70m구간)

○ ‘19. 10.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수

○ ‘20.  5.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 완료

○ ‘20.  7.: 공사 착공 및 일시정지(2020.7.16.보상미완료)

○ ‘20.  9.: 감정평가 완료 및 보상협의 실시

□ 향후계획

○ ‘21.  3.: 수용재결(2필지,지장물2건)

○ ‘21.  6.: 공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

부산시민공원 주변 지중화사업

담당자

건설과 김소연(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민공원 북문 교차로 일원에 무분별하게 난립한 한전 및 통신선로를

지중화하여 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기  간: 2017년~2020년

○ 위  치: 연지동 시민공원 북문 교차로 일원

○ 규  모: 한전 및 통신선로 지중화 L=800m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ ’17.  8.: 한전 지중화사업 대상 확정

○ ’18.  4.: 협약 체결

○ ’18.  6.: 지중화사업비 우리구 분담금 집행완료(1,178백만원)

○ ’18. 12.: 지중화공사 착공

○ ’19. 10.: 포장복구공사 완료

○ ’20. 4.: 전체 지중화사업 완료

□ 향후계획 : 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가야동568-7번지 일원 도로개설

담당자

건설과 박상준(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2005 ~ 2021

○ 위  치 : 부산진구 가야동 568-7번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=270m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	4,000	800
국 비
시 도 비	500	500
시군구비	3,800	3,000	800
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ ‘18.  1.: 본예산(22억원) 확보 및 실시설계용역 착수

○ ‘18.  4.: 실시설계용역 완료

○ ‘18.  6.: 보상협의

○ ‘18. 11.: 2회추경(8억원) 확보

○ ‘19. 12.: 수용재결 보상완료(공탁)

○ ‘20.  7.: 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘21.  9.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비: 당초 4,400백만원, 변경 4,800백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

개금2동사 건립

담당자

개금2동 신미혜(☎605-6907)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후하고 협소한 동사를 넓고 쾌적한 환경을 갖춘 공공청사로 건립하여

효율적인 행정․복지 서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위  치 : 부산진구 개금동 633-5번지 (복지로 93)

○ 규  모 : 부지 662㎡, 연면적 996.36㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,904백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,904	1,044	1,860
국 비
시 도 비	400
시군구비	2,504	1,044	1,860
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  7월 : 신축동사 건립계획 수립

○ 2017.  8월 : 부산시 지방재정 투자심사

○ 2017. 10월 : 2018년 본예산(1,900백만원 ▷시400, 구1,500 ※2019년 명시이월)

○ 2018.  3월 : 공유재산(경로당, 창고) 매수 완료 ▷ 446백만원

○ 2018.  5월 : 신축부지 재산관리관 변경, 지적합병 완료

○ 2019.  3월 : 엄광경로당 이전 예산(1회 추경, 100백만원) 확보 ▷ 노인장애인복지과

○ 2019. 3∼8월 : 설계용역 계약 및 완료

○ 2019.  7월 : 공사비 예산 추가 확보(2회 추경, 600백만원 ※2020년 명시이월)

○ 2019.  9월 : 건축승인

○ 2019. 10월 : 임시동사 및 엄광경로당 이전

○ 2019. 11월 : 기존동사 및 엄광경로당 철거 완료

○ 2019. 12월 : 공사착공 및 기공식 개최

○ 2020.  9월 : 공사준공 및 개소식 개최

□ 향후계획 : 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

행복문화센터(개금3동사) 건립

담당자

개금3동 유하늘(☎605-6932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 39년 이상되어 노후 된 동사를 행복문화센터로 건립하여 주민들에게 쾌적한 환경을 조성하고 효율적인 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 7월 ~ 2021년

○ 위  치 : 부산진구 개금동 428-8번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 517㎡, 연면적 1,611.51㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 사업비 : 4,239백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,239	117	1,419	2,703
국 비
시 도 비	600	33	348	219
시군구비	2,839	84	1,006	1,749
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	800		65	735

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017년 : 개금3동 복합동사 건립 계획 수립, 주민설명회 개최, 구의회 공유재산관리계획 심의, 부산시 투자사업 심사 승인

○ 2018년 : 사업부지(구거) 매입

○ 2019년 : 사업부지 도시관리계획 용도지역 변경(제3종일반주거지역➝준주거지역)

○ 2020년 : 설계완료, 동사 이전 및 철거, 신축공사 착공

□ 향후계획

○ 2021년 : 개금3동 행복문화센터 건립 준공(8월 예정)

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경(2020년)	현재(2021년)
사업기간	2017년~2019년	2017년~2021년	좌동
총사업비	3,761백만원	4,159백만원	4,239백만원
변경사유	공사비 기준단가 인상 반영(1,970천원/㎡➝2,569천원/㎡)		인테리어 등 추가 소요비용 반영

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

부암동 백양대로34번길 도로개설

담당자

건설과 김소연(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역의 도시기반시설(도로)을 확충하여 지역 균형

발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년~2021년

○ 위  치 : 부산진구 부암동 백양대로34번길 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=220m, B=6~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,900	1,400	1,056	444
국 비	1,450	700	528	222
시 도 비	725	375	264	111
시군구비	725	375	264	111
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `17. 12.: 주한미군 공여구역 주변지역 지원 사업 선정

○ `19.  1.: 2019년 본예산 반영(국비 500 시비 250 구비 250)

○ `20.  1.: 2020년 본예산 반영(국비 500 시비 250 구비 250)

○ `20.  12.: 보상완료(전구간)

□ 향후계획

○ `21.   2.: 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 부암2주택재개발정비구역 해제로 인한 도시계획시설(도로, 소로 2-33호선)

환원으로 주민요구사항을 고려하여 사업구간 변경

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

백양대로68번길 일원 도로개설

담당자

건설과 김소연(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감시장 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018.~2021.

○ 위  치 : 당감동 백양대로68번길 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=150m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,140	3,500	640
국 비
시 도 비
시군구비	4,140	3,500	640
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ `20.  3: 보상 완료(1차)

○ `20.  4: 협의보상 실시(2차)

○ `20.  6: 구비 640백만원 확보(2020 2회추경)

○ `20.  8: 공사 착공

○ `20. 11.: 수용재결 완료(2차)

□ 향후계획

○ `21. 9. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감동725-1번지 일원 도로개설

담당자

건설과 윤항재(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2018. ~ 2022.

○ 위  치: 부산진구 당감4동 백양순환로 12~당감서로 63 일원

○ 규  모: 도로개설 L=295m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	3,500		300	1,200
국 비
시 도 비	1,500			300	1,200
시군구비	3,500	3,500
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

○ ‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○ ‘18. 12.: 실시설계용역 완료

○ ‘20.  6.: 실시계획고시(L=135m) 및 1차 공사 착공(L=160m)

□ 향후계획

○ ‘21.  1.: 1차 공사 준공(L=160m)

○ ‘21.  2.: 2-1차(L=90m) 보상 공탁 완료 , 추가 예산확보 후 잔여구간 사업추진

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가야1동60-52번지 일원 도로개설

담당자

건설과 노치민(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위  치 : 부산진구 가야1동 60-52번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=70m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300	1,900	400
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	1,900	400
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

❍ ‘18.  1. : 2018년 본예산 19억 확보

❍ ‘19.  6. : 2회추경 예산확보(300백만원)

❍ ‘19. 10. : 보상협의 90% 완료

❍ ‘19. 11. : 3회추경 예산확보(100백만원)

❍ ‘19. 11. : 공사착공

❍ ‘20. 6. : 공사준공

□ 향후계획 : 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

범천4동1104번지 일원 도로개설

담당자

건설과 박상준(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미개설에 따른 주변 기 개설도로와 비교 주민불만 해소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 1104번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=120m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,800	2,800
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	2,300
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘19.  4. : 실시설계용역 완료

○ ‘19.  7. : 실시계획(1차구간 L=45m) 고시

○ ‘19. 11. : 감정평가(1차구간 L=45m)

○ ‘20.  5. : 실시계획(2차구간 L=75m) 고시

○ ‘20. 11. : 손실보상1차협의(2차구간)

○ ‘20. 12. : 수용재결(1차구간)

□ 향후계획

○ ‘21. : 공사발주

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감동 동평로73번길 41 일원 도로개설

담당자

건설과 장효진(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 동평로73번길 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형

발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019.~2021.

○ 위  치 : 부산진구 당감동 744-15번지~730-81번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=170m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,900	2,000		420	1,480
국 비
시 도 비
시군구비	3,900	2,000		420	1,480
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ `19.  5: 실시설계용역 완료

○ `20.  5: 보상 완료(1차)

□ 향후계획

○ `20.  7. ~ `21.  3.: 보상 절차 이행(2차)

○ `21.  4.: 보상 절차 이행(3차)

○ `21.  7.: 공사 착공(전 구간)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감동 당감로25번길 일원 도로개설

담당자

건설과 윤항재(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량

진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른

집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2019. ~ 2022.

○ 위  치: 부산진구 당감동 440-2번지 ~ 430-12번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=210m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,800	2,000	400		3,400
국 비
시 도 비	1,500				1,500
시군구비	4,300	2,000	400		1,900
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 25%)

○ ‘19. 1.: 실시설계용역 착수

○ ‘19. 5.: 실시설계용역 완료

○ ‘20. 6.: 실시계획고시(L=110m) 및 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘21. 4.: 1차 공사 완료(L=110m), 추가 예산확보 후 잔여구간 사업추진

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

백양 문예복합센터 건립

담당자

문화체육과 박선민(☎605-4065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부암·당감권역 내에 주민들을 위한 문화·예술 공간이 전무하여 거점시설 역할을

하는 문화예술복합센터를 건립하여 지역주민들의 문화·예술·여가 활동공간 마련

및  활성화를 도모할 수 있는 기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019. 1 ~2021. 12

○ 위  치 : 부산진구 부암동 507-2 외 5필지

○ 규  모 : 부지 991㎡, 지상6층, 연면적 2,100㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,050	2,977	294	5,779
국 비
시 도 비	2,525			2,525
시군구비	6,525	2,977	294	3,254
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   60%)

○ 2020. 7.   사업부지 건물 철거완료

○ 2020. 12.  설계공모 진행 및 선정 완료

□ 향후계획

○ 2021. 1.  실시설계 착공

○ 2021. 7.  실시설계 준공 및 공사 착공

○ 2022. 12. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 공사비 82.5억원 ► 변경 공사비 90.5억원 (8억원 증액)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

(가칭)성지종합사회복지관 건립

담당자

희망복지과 조애정(☎605-4314)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복지관의 혜택에서 소외된 연지·초읍 지역의 복지수요 충족

○ 지역주민에 대해 종합적인 복지서비스 제공 및 잘사는 행복도시 여건 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 산 70-1번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 8,076㎡, 건물 2,034㎡(지하1층, 지상4층)

○ 착공일 및 준공일 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,192		2,143	6,860	3,189
국 비
시 도 비	2,800			2,800
시군구비	8,392		1,143	4,060	3,189
지 방 채
민간자본
기타(교부세)	1,000		1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018년 09월 : (가칭)성지종합사회복지관 건립기본계획 수립

○ 2018년 11월 : 공유재산심의회 및 구 중기지방재정계획 반영

○ 2019년 1월~12월 : 복지관 부지배입비 등 건립예산 확보 및 편성

○ 2019년 12월 : 도시관리계획(초연공원 조성계획) 변경(결정) 및 실시설계 용역 추진

○ 2020년 1월 : 부산광역시 도시공원위원회 심의 의결(조건부)

○ 2020년 5월 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 실시계획 인가 고시

○ 2020년 7월 : 건립공사에 다른 지반조사 용역 실시

○ 2020년 8월 : 보상금액 결정(건설과)

○ 2020년10월 : 공유재산심의회 의결 및 공공건축사전검토 신청

○ 2020년12월 : 공유재산관리계획 심의 의결, 공공건축심의위원회 심의

수용재결 신청(구→ 시 건설행정과)

□ 향후계획

○ 2021년 상반기 : 설계용역 계약심사 및 설계공모, 기술용역발주계획 심의

○ 2021년 하반기 : 실시설계용역(BF 예비인증 및 건축허가 포함), 계약심사

○ 2021년 ~ 2022년 : 공사발주 및 착공, 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감생활문화센터 조성

담당자

문화체육과 박선민(☎605-4065)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 지역주민들의 생활문화욕구 충족 및 동아리 활성화를 위한 주민자율공간 조성

❍ 청소년들의 꿈과 창의적 사고를 펼칠 수 있는 독립공간 마련 필요

□ 사업개요

❍ 기  간 : 2020. 1 ~2021. 9

❍ 위  치 : 부산진구 당감동 751-3

❍ 규  모 : 부지 249㎡, 지상4층, 연면적 543.28㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 1,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,920		1,543	377
국 비	900		900
시 도 비	900		633	267
시군구비	120		10	110
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

❍ 2020. 5월 : 건물(석면)철거·경계측량·지반조사 완료

❍ 2020. 8월 ~ 11월 : 설계용역 착공 및 준공

❍ 2021. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

❍ 2021. 9월 중 : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

동평중 개방형 다목적체육관 건립

담당자

문화체육과 이종하(☎605-4094)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개방형 다목적체육관 건립을 통해 다양한 체육수업을 실시하고 각종 행사 시

개최 장소로 활용할 뿐만 아니라 지역주민의 문화체육시설로도 활용하여 지역

사회 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1. ~ 2022. 2.(26개월)

○ 위  치 : 부산광역시 부산진구 백양순환로 119번길 12-31(당감동)

○ 규  모 : 지상 2층(연면적 1,066㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,956백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,956		3	3,448	505
국 비
시 도 비	300			300
시군구비	300			300
지 방 채
민간자본
기 타	3,356		3	2,848	505

※ 기타(국민체육진흥기금 : 900, 교육부 특별교부금 1,951, 부산광역시교육청 505)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20 %)

○ 2021년 1월말까지 설계용역 진행중

○ 2021년 5월 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022년 2월 공사 준공 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

새뜰마을사업(다함께 안창) 추진

담당자

도시재생과 주송진(☎605-5824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심에서 고립된 지역특성상, 개발에서 소외되어 생활인프라 부족 등 주거
여건이 열악함

○ 호계천을 경계로 구분되는 동구의 안창마을이 새뜰마을 사업을 추진하고

있어 상대적 박탈감 야기하고 있으므로 해당사업을 통해 분위기쇄신 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위  치 : 범천2동 1544-54번지 일원 / 0.42㎢

○ 내  용 : 안전확보, 생활·위생 인프라 개선, 주택정비, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,690	1,883.7	2,046.3	1,050	710
국 비	3,983	1,449	1,302	735	497
시 도 비	512.1	-	353.7	94.5	63.9
시군구비	1,194.9	434.7	390.6	220.5	149.1
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  17%)

○2020. 05. : 마을주차장 조성부지 매입

○2020. 07. : 집수리사업 추진계획 수립

○2020. 08. : 마스터플랜 국토부심의 통과, 민관협력형 노후주택개선사업

공모선정(해비타트), 주민쉼터 조성부지 철거완료

○2020. 10. : 위험목 정비완료(1차), 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 추진계획 수립

○2020. 12. : 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 계약체결, 주민커뮤니티센터 착공

□ 향후계획

○ 고령자배려 골목길정비: 2021.1. 준공예정 (2020.11.착공, 298백만원)

○ 방재공원 및 주민쉼터: 2021.2.준공예정 (2020.11.착공, 75백만원)

○ 주민커뮤니티센터: 2021.8. 준공예정 (2020.12.착공, 2,000백만원)

○ 주민역량강화 및 휴먼케어: 2021~2022년, 307백만원

○ 민관협력형 노후주택 개선사업: 2022.12. 준공예정, 340백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

(가칭)당감동 복합 국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 김미진(☎605-4092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집 지역인 당감동에 체육시설을 건립하여 권역별 균형있는 생활체육

활성화를 도모하고, 다양한 연령층의 수요에 부응하는 생활밀착형 체육시설을

확충

□ 사업개요

○ 기  간 :  2019. 7. ~ 2022. 12.

○ 위  치 :  당감동 257-16번지 외 7필지

○ 규  모 :  지하3층/지상7층(건축면적 776.16㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,761백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,761	5,140	5,209	8,412
국 비	5,000	1,000	1,700	2,300
시 도 비	3,333			3,333
시군구비	10,428	4,140	3,509	2,779
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17.6%)

○ ‘19. 3. : 생활밀착형 국민체육센터 공모사업신청 확정(단일형)

○ ‘19.10. : 생활SOC복합 국민체육센터 사업 선정(복합형)

○ ‘19.12. : 부지매입 및 추진계획 재수립(복합형)

○ ‘20.07. : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ ‘21. 2. : 설계용역 완료

○ ‘21. 3. : 공사계약 및 발주

○ ‘21. 3. : 공사 착공, ‘22.12. 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가야1동256-13번지 일원 도로개설

담당자

건설과 노치민(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 가야1동 256-13번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=130m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,600		30	1,570
국 비
시 도 비
시군구비	1,600		30	1,570
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

❍ ‘20.  1. : 2020년도 본예산확보(구비 30백만원)

❍ ‘20.  1. ~ 7. : 실시설계용역

□ 향후계획

❍ ‘21.  9. : 보상협의

❍ ‘21.  12. : 공사 착공

❍ ‘22.  05. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감동689번지 일원 도로개설

담당자

건설과 장효진(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 689번지 일원 주택밀집지역의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역

균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2020년~2022년

○ 위  치: 당감동 689번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=250m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,900	50		2,000	3,850
국 비
시 도 비
시군구비	5,900	50		2,000	3,850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’20.  7.: 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ `21.  6.: 예산확보 후 보상 절차 이행

○ `22.  1.: 공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

커뮤니티하우스 ‘도란도란’ 건립

담당자

희망복지과 박현규(☎605-4317)

□ 사업목적 및 필요성

○「부산진구 지역사회통합돌봄 선도사업」추진에 따른 기반시설 조성 필요

○ 주거 외 다기능(복합) 공간 연계로 초고령화사회 대비 미래형 주거모형 개발

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020.1월 ~ 2021.9월 [1년9월]

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 376-54번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 333㎡, 연면적 733.16㎡, 지하1층 / 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,874백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,874	397	804	1,673
국 비	1,000		400	600
시 도 비	500		202	298
시군구비	1,374	397	202	775
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2019.10월 : 커뮤니티하우스 ‘도란도란’ 건립계획 수립

○ 2019.10월 ~ 12월 : 사전절차 이행(투자심사, 공유재산심의, 주민설명회 등)

○ 2020.2월 : 지반조사(용역) 실시

○ 2020.3월 : 공공건축심의위원회 의결

○ 2020.5월 : 건립계획 변경 및 설계 용역 등 건립 의뢰

○ 2020.7월 ~ 11월 : 설계용역 실시[100일간]

○ 2020.11월 : 공사계약 의뢰 및 건립부지 지장물 제거

○ 2020.12월 : 공사계약 체결 및 선금 지급(680백만원)

□ 향후계획

○ 2021. 1월 ~ 2021.9월 : 공사착공 및 공사준공

○ 2021. 10월 : 개소 및 운영

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업예산	2,000백만원	2,477백만원
사업기간	2020.1월 ~ 12월	2020.1월 ~ 2021. 9월

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

전포 어울더울 복합문화센터 건립

담당자

여성가족과 김종원(☎605-4374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국공립어린이집을 중심으로 작은도서관, 다함께돌봄센터 및 주민편의시설       등 다기능 복합건물을 건립하여 양질의 보육환경을 조성하고 주민생활의       질 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020.1. ~2022.5.

○ 위  치 : 부산진구 서전로58번길 143(옛 전포3동사)

○ 규  모 : 지하1층/지상3층, 연면적 665㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,297백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,287			2,287
국 비	289			289
시 도 비	59			59
시군구비	1,939			1,939
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ ‘21.06.~10. : 실시설계용역 진행 중

□ 향후계획

○ ‘21. 11. 공사계약

○ ‘21. 12. 착공

○ ‘22. 10. 준공

사업명

전포 어울더울 복합문화센터 건립

담당자

여성가족과 김종원(☎605-4374)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2020. 1. ~ 2020. 12	2021. 1. ~ 2022. 5.
위 치	전포동 363-41외 2필지	전포동 363-41외 2필지
대지면적	444.9㎡	444.9㎡
연 면 적	1,124㎡	665㎡
사업형태	기존 건물 철거 후 복합시설 신축	기존 건물 철거 후 복합시설 신축
사업내용	지하1층 (280㎡): 주차장	지하1층 (32㎡): 기계실, 수조실
	지상1층 (211㎡): 공립어린이집	지상1층 (211㎡): 공립어린이집
	지상2층 (211㎡): 작은도서관,다함께돌봄센터	지상2층 (211㎡): 주민편의시설 (카페 마실, 장난감도서관)
	지상3층 (211㎡): 카페‘마실’	지상3층 (211㎡): 작은도서관,다함께돌봄센터
	지상4층 (211㎡): 청년 쉐어 하우스	-
사 업 비	3,112백만원 (국 294, 시 61.5, 구 2,756.5)	2,297백만원 (국 294, 시 61.5, 구 1,941.5)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가남공영 주차장 증축사업

담당자

주차관리과 심지원(☎605-5882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가야1동 고지대 산복도로 주차공간 절대 부족에 따른 확충

○ 주차공간 확충을 통한 주차환경개선으로 주민편의 증진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019. 1. ~ 2020. 10.
○ 위  치 : 부산진구 가야동 8-6번지 일원

○ 규  모 : 철골식 3층 4단 124면, A=2,580.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,389백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,389	239	2,150
국 비	870	239	631
시 도 비	497		497
시군구비	1,022		1,022
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 09. : 공유재산심의회(변경) 심의 원안 가결

○ 2019. 10. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 11. : 계약심사 및 건축허가

○ 2020. 01. : 건축, 토목, 소방 등 공종별 공사 발주 및 착공

○ 2020. 09. : 전문공사 준공

○ 2020. 10. : 건설공사 준공

○ 2020. 11. : 주거지전용주차장 운영 재개

□ 향후계획 : 사업완료

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

양정복합공공도서관 건립

담당자

평생교육과 고이현(☎605-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육과 보육을 함께 영위하는 지역 문화공동체 커뮤니티 시설 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

○ 위  치 : 부산진구 양정동 506-6

○ 규  모 : 부지 1,023.4㎡, 연면적 1,860㎡, 지상 1~5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,463	363	2,080	3,020
국 비	2,579		843	1,736
시 도 비	1,284
시군구비	1,600		1,600
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 생활SOC 복합화 사업 ‘양정복합공공도서관 건립’ 선정

○ 인근 부동산 매입 완료(양정동506-30)

□ 향후계획

○ 이용자 중심의 ‘기적의도서관’ 건립 추진

➱『책읽는사회문화재단』업무협약 및 설계 기증

○ 공사 착공 및 준공

○ 인근 부지 추가 매입 지연 ▷ 2020. 7월 매입 완료, 9월 등기 완료

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

전포2동 복합센터 건립

담당자

전포2동 전은진(☎605-6664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 동사는 노후하고 협소하여, 주민불편이 크므로 복합 용도의 공공청사를

건립하여 주민이 만족하는 행정·복지 서비스를 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~2022년

○ 위  치 : 전포동 175-26번지

○ 규  모 : 지하1층/지상5층, 대지면적 348.1㎡, 연면적 1,164㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,377백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,377			4,377
국 비	398			398
시 도 비	150			150
시군구비	3,829			3,829
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ `19.07. : 전포2동사(복합센터) 건립계획안 보고

○ `19.10. : 부산시 지방재정투자심사 승인

○ `20.10. : 사업 부지 결정

○ `20.11. : 부산진구 공유재산 관리계획 승인

□ 향후계획

○ `21.04. : 설계공모

○ `21.07. : 설계

○‘21.11. : 착공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
위 치	전포동 175-26번지외 1필지	전포동 175-26번지
대지면적/연면적	605㎡/2,687㎡	348.1㎡/1,164㎡
규 모	지하2층/지상4층	지하1층/지상5층

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

당감복합공공도서관 건립

담당자

평생교육과 고이현(☎605-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육과 문화를 함께 영위하는 지역 문화공동체 커뮤니티 시설 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

○ 위  치 : 부산진구 당감동 93-17

○ 규  모 : 부지 439㎡, 연면적 1,727㎡, 지하1층 ~지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,900			3,687	2,213
국 비	2,950			1,475	1,475
시 도 비	1,475			737	738
시군구비	1,475			1,475
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 사업추진을 위한 특별교부세 500백만원 확보

○ 공유재산 심의회 및 관리계획 의결, 지방재정 투자심사 완료

○ ‘20. 3.  당감복합공공도서관 건립 기본 계획 수립

○ ‘20. 9.  생활SOC 복합화 사업 ‘당감복합공공도서관 건립’ 선정

□ 향후계획

○ 사업계획 사전검토 및 기본설계, 실시설계 용역

○ 공사착공 등

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가야2동사(청소년 문화센터) 건립

담당자

가야2동 최상규(☎605-6857)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30여년 된 노후·협소한 동사를 청소년 문화센터와 복합청사로 건립하여

청소년을 비롯한 지역주민에게 쾌적한 문화시설 및 효율적인 행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위  치 : 부산진구 가야동 519-1번지

○ 규  모 : 지하1층/지상5층, 대지면적 810㎡, 연면적 1,858.35㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,940백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,940	2,078	4,262	600
국 비	1,700		1,700
시 도 비	316		116	200
시군구비	4,924	2,078	2,446	400
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○ 2020년 6월 설계공모 및 용역업체 선정

○ 2020년 7월 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2020년 12월 공사 입찰(시공사 선정) 및 계약

□ 향후계획

○ 2021년 1월 착공(예정)

○ 2021년 11월 완공(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

당초 사업(현 동사부지에 동사건립)	변경된 사업(신규매입부지에 동사건립)
사업위치 : 부산진구 가야2동 601-7외 4필지 사 업 량 : 부지 889㎡, 연면적 1,320㎡ 총사업비 : 3,557백만원	사업위치 : 부산진구 가야동 519-1번지 사 업 량 : 부지810㎡, 연면적 1,828.35㎡ 총사업비 : 6,940백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

개금3동 가야대로507번가길

일원 도로개설

담당자

건설과 박지혜(☎605-4705)

□ 사업목적 및 필요성

❍ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

❍ 도시기반시설 확충으로 주택가 이면도로 확보

□ 사업개요

❍ 기  간 : 2019 ~ 2022

❍ 위  치 : 개금3동 가야대로507번가길 일원

❍ 규  모 : 도로개설 L=650m, B=8~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	33	350	1,658.5	5,958.5
국 비	4,000	33	167	761	3,039
시 도 비	2,000		100	380.5	1,519.5
시군구비	2,000		83	517	1,400
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

❍ ‘19.  8. : 실시설계용역 완료(1차 L=160m)

❍ ‘20.  1. : 실시계획 고시(1차 중 L=60m)

❍ ‘20.  1. : 기본 및 실시설계용역 착수(2차 L=494m)

❍ ‘20.  6. : 실시계획 고시(전체 L=650m)

❍ ‘20. 12. : 기본 및 실시설계용역 진행중(국가철도공단 협의 중)

□ 향후계획

❍ 미개설구간 보상, 공사 시행 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

전포2동 밭개마을 새뜰마을 사업

담당자

도시재생과 정재훈(☎605-5825)

□ 사업목적 및 필요성

○ 열악한 주거환경 및 생활 인프라를 개선하고 주민 공동체 활동지원 등을

통해 쇠퇴하는 마을 재생 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

○ 위  치 : 부산진구 전포동 175-2번지 일원

○ 규  모 : A=58,601.3㎡

○ 내  용 : 골목길 정비, 커뮤니티시설 조성, 노후주택 개보수,

주민역량강화 및 공동체 활성화 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,750		187	1,704.4	3,858.6
국 비	4,025		167.6	1,142.4	2,715
시 도 비	517.5		5.8	169	342.7
시군구비	1,207.5		13.6	393	800.9
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2019. 12. : 2020년 취약지역 생활여건 개조사업 공모신청 계획 수립

○ 2020. 1. : 사업계획 수립 및 공모 신청

○ 2020. 2. : 공모사업 현장평가 실시 - 균형위

○ 2020. 3. : 2020년 도시 취약지역 생활여건 개조 신규사업 최종선정

○ 2020. 5. : 마스터플랜 및 우선사업 실시계획 등 수립 추진

○ 2020. 11. : 편안길 조성사업 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 2. 노후 상수관 개량  ▷ L = 27m

○ 2021. 2. 폐·공가 정비 시행

○ 2021. 3. 새뜰마을사업 마스터플랜 승인 ▷ 국가균형발전위원회

○ 2021. 6. 도시가스 신설공사 ▷ L = 457m / 67세대 연결

○ 2021. 7. 편안길 조성사업 추진 ▷ 600백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

재활용선별장 시설 현대화 사업

담당자

청소행정과 김정환(☎605-4802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재활용품의 안정적 선별처리를 위해 구군 처리시설 확충 개선 필요

○ 구군 재활용 처리능력 강화로 공공선별률 제고

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2025년

○ 위  치 : 부산진구 가야대로 407(현 재활용사업소)

○ 규  모 : 50톤/일(처리율 22%, 반입량 약 33톤)

○ 착공일/준공일 : 2023년/2025년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,952백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,952				5,952
국 비
시 도 비	3,571				3,571
시군구비	2,381				2,381
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 타당성 조사 용역 : 2019년

○ 국․시비 예산 반영 사전심사 및 투자 심사 : 2020년

□ 향후계획

○ 사업예산 확보, 기본 및 실시 설계 : 2022년

○ 계약심사 후 사업발주 및 착공 : 2023년

○ 시설공사 준공 및 가동 : 2025년

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

가야1동 60-11번지 일원 도로개설

담당자

건설과 노치민(☎605-4702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 가야1동 60-11번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=100m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,900		1,186	1,714
국 비
시 도 비
시군구비	2,900		1,186	1,714
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

❍ ‘20.  1. : 2020년도 본예산(1,500백만원) 확보

❍ ‘20.  1. : 실시설계용역 착수(※ 용역사: HK이앤씨)

❍ ‘20.  6. : 실시계획고시

❍ ‘20.  6. : 실시설계용역 완료(※ 용역사: HK이앤씨)

❍ ‘20.  6. : 공사 착공

❍ ‘20.  7. : 공사일시정지(2020.7.8.보상미완료) 및 보상협의

□ 향후계획

❍ ‘21. 10. : 이의재결 완료 및 공사 재개

❍ ‘21. 12. : 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

부암동670-9번지 일원 도로확장

담당자

건설과 김소연(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부암동 670-9번지 일원 우회전 차선 확보를 통해 주택밀집지역의 교통혼잡 해소

□ 사업개요

○ 기  간: 2021년~2022년

○ 위  치: 부암동 670-9번지 일원

○ 규  모: 도로확장 L=55m, B=5→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300		50	2,250
국 비
시 도 비
시군구비	2,300		50	2,250
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ’20. 12.: 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ `21.  6.: 도시관리계획(도로) 결정 및 실시계획 고시

○ `22.  1.: 공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

전포로(路)!문화로(路)!놀로WOW∼

담당자

문화체육과 조서연(051-605-4066)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전포 공구거리 및 전포카페거리를 무대로 지역민, 청년, 지역예술인들이

문화적 갈증을 해소하고 역량을 펼칠 수 있는 기회를 지속적으로 제공

하기 위함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 전포로(路)! 문화로(路)! 놀로WOW!

○ 기    간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월

○ 장    소 : 전포공구거리 및 전리단길 일원

○ 협업단체 : 부산진문화재단

○ 총사업비 : 180,000천원(국비 90,000천원 구비 90,000천원)

○ 사업내용 : 전포공구거리를 배경으로 부산진구청, 부산진문화재단, 지역예술인,

마을 공동체 등과 유기적이면 다양한 문화예술프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	180			180
국 비	90			90
시 도 비
시군구비	90			90
지 방 채
민간자본
기타(교부세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 해당 없음(사업기간: 2021. 1월 ~ 2021. 12월)

□ 향후계획

○ 2021. 1월. 프로그램 위탁사업 신청(재단→구청), 사업비 교부(구청→재단)

○ 2021. 4월~10월 매월 마지막 주 토요일(총5회) 문화예술프로그램 운영예정

- 4월 24일(토) / 5월 29일(토) / 6월 26일(토) / 9월 25일(토) / 10월 30일(토)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

삶의 불빛을 잇다. 호천 르네상스(도시재생 뉴딜사업)

담당자

도시재생과 정창주(☎605-1632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴하고 취약한 노후 주거지 및 보행취약환경 개선

○ 공유와 협력, 신뢰의 미래가치를 함께하는 공동체적 삶 지원

○ 우수한 경관자원 활용으로 관광활성화 및 마을기업 육성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021 ~ 2024

○ 위  치 : 부산진구 범천동 1525-10번지 일원

○ 규  모 : A=138,880㎡

○ 내  용 : 주거환경개선사업, 보행친화환경 조성, 따뜻한 주거복지,

호천마을 특화사업, 공동체 활성화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,477백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	28,477			2,070	26,407
국 비	9,500			1,380	8,120
시 도 비	4,750				4,750
시군구비	4,750			690	4,060
지 방 채
민간자본
기 타	9,477				9,477

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  - %)

○ 2020. 5. : 주민설명회

○ 2020. 9. : 주민공청회

○ 2020. 10. : 구의회 의견 청취

○ 2020. 11. : 중앙선정 뉴딜사업 실현가능성 및 타당성 평가

○ 2020. 12. : 도시재생특별위원회

□ 향후계획

○ 2021. 4. : 지방도시재생위원회 심의

○ 2021. 4. : 범천지역도시재생활성화계획 고시 등

개별 투자심사 사업 추진현황

(2020.12.31.기준)

사업명

부산진지역자활센터 매입 이전

담당자

희망복지과 이주영 (☎605-4332)

□ 사업목적 및 필요성

○안정된 거점시설을 확보하여 자활촉진 사업의 핵심 인프라 역할 수행

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ~ 2021. 10.

○ 위  치 : 부산광역시 부산진구 새싹로 251 (초읍동)

○ 규  모 : 대지면적 374.9㎡, 연면적 730.17㎡지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,750			2,750
국 비
시 도 비
시군구비	650			650
지 방 채
민간자본
기 타	2,100			2,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  %)

○ 공유재산심의회 심의 의결 : 2020. 10. 28.

○ 2020년 3차 자체 투자심사(서면) : 2020. 11.

○ 공유재산 관리계획안 의회 심사 : 2020. 11.

○ 2021년도 자활기금 의회 심사 : 2020. 12.

□ 향후계획

○ 부동산 취득 매입계약 및 등기 : 2021. 1. ~ 2.

○ 실시설계용역 착수 : 2021. 2.

○ 공사(소방, 리모델링) 착공 : 2021. 8.

○ 공사 완료 및 부산진지역자활센터 이전 : 2021. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 2,600백만원에서 2,750백만원으로 150백만원 증액(리모델링 및 소방비)

10-2. 지방채 발행사업

우리 부산진구에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 부산진구에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.