109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 부산진구에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
범천2 주거환경 개선 사업	4,899	4,899	0	0	0	2023	2014	70
하천복개구조물 재해예방 사업	23,256	21,546	130	380	1,200	계속	2013	0
부암3동~당감1동간 도로개설 사업	4,375	3,902	473	0	0	2021	2011	100
범천2동 동일아파트주변 도로개설	7,840	2,040	0	5,800	0	2022	2014	40
당감동 동평상가아파트 일원 도로개설	6,000	3,984	1,202	814	0	2022	2018	70
도시재정비촉진 사업 지원(새싹로)	45,429	45,229	200	0	0	2021	2016	100
어린이대공원~ 사직동간 도로개설	22,860	17,816	4,050	994	0	2022	2016	70
전포동~서면아파트 일원 도로개설	3,230	2,500	687	43	0	2022	2016	90
가야2동568-7번지 일원 도로개설	4,950	4,800	101	49	0	2022	2017	90
행복문화센터 (개금3동사) 건립	4,184	1,536	2,648	0	0	2021	2018	100
부암동 백양대로34번길 일원 도로개설	3,200	2,017	883	300	0	2022	2017	70
백양대로68번길 일원 도로개설	4,159	3,369	790	0	0	2021	2018	100
당감동725-1번지 일원 도로개설	5,900	4,894	606	400	0	2022	2018	70
당감동624~689번지 일원 도로개설	1,900	1,613	287	0	0	2021	2018	100
범천4동1104번지 일원 도로개설	2,800	416	1,884	500	0	2022	2019	20
당감동 동평로73번길 41 일원 도로개설	4,820	1,695	1,004	2,121	0	2022	2019	50

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
당감동 당감로25번길 일원 도로개설	5,800	2,331	669	2,800	0	2022	2019	60
백양문화예술복합 센터 건립	13,730	3,117	178	8,783	1,652	2023	2019	50
(가칭)성지종합사회복지관 건립	14,500	945	2,721	9,834	1,000	2023	2019	20
부산진구 생활문화센터 조성	1,724	107	1,617	0	0	2021	2019	100
동평중학교 개방형 다목적체육관 건립 지원	3,956	3	3,684	269	0	2022	2019	80
새뜰마을사업 (다함께 안창)추진	5,690	1,313	2,353	2,024	0	2022	2019	65
(가칭)당감동 복합국민체육센터 건립	19,966	2,980	2,202	4,939	9,845	2023	2019	20
가야1동256-13번지 일원 도로개설	1,980	30	0	1,950	0	2022	2019	5
당감동689번지 일원 도로개설	5,900	50	9	2,241	3,600	2023	2019	5
커뮤니티하우스'도란도란'건립	2,871	1,201	1,670	0	0	2021	2019	100
전포 어울더울 복합문화센터 건립	3,593	0	22	3,571	0	2022	2021	5
양정복합공공 도서관 건립	9,965	363	38	9,564	0	2023	2021	25
전포2동 복합문화센터 건립	4,997	0	194	454	4,349	2023	2019	20
당감복합공공 도서관 건립	7,382	0	213	7,169	0	2023	2019	20
가야2동사(청소년 수련시설)건립	7,019	2,078	2,994	1,947	0	2022	2019	90
부암1동 도시재생 뉴딜사업	8,500	5,057	1,596	1,847	0	2022	2019	78
개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설	8,000	383	1,164	3,166	3,287	2023	2017	10
전포2동 밭개마을 새뜰마을 사업	5,750	187	764	3,183	1,616	2023	2020	25
당감동474-2번지 일원 도로개설	1,900	1,077	823	0	0	2022	2020	30
재활용선별장 시설 현대화 사업	5,952	0	0	0	5,952	2027	2020	0

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
가야1동60-11번지 일원 도로개설	2,900	1,500	1,075	325	0	2022	2020	100
부암동670-9번지 일원 도로확장	2,300	16	34	2,250	0	2022	2020	5
범천2동 도시재생 뉴딜사업 (삶의불빛을잇다.호천르네상스)	28,477	1,047	1,013	9,640	16,777	2024	2020	6
부산진지역자활센터 매입 이전	2,750	0	2,750	0	0	2021	2020	100
시설현대화 (개금골목시장 고객지원센터)	1,392	2	906	484	0	2022	2020	30
시설현대화 (부전상가7차 아케이드)(전환사업)	1,250	38	1,078	134	0	2021	2020	100
경로당 건립	1,585	356	780	449	0	2022	2020	70
부암동 주거지전용주차장 (신선마을)	1,812	0	660	1,152	0	2022	2020	0
초읍동 어린이회관일원 도로개설	1,100	29	132	939	0	2022	2020	10
초읍동 277-7번지 일원 주거지전용주차장	2,125	0	831	1,294	0	2022	2021	0

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

범천2 주거환경개선사업

담당자

건축과 김소양(☎605-4614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변지역 개발여건 및 대상지 현황과 연계한 쾌적한 주거환경 조성

○ 주거의 안정성 및 편리성의 충족과 주거생활의 질적 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2023

○ 위 치 : 범천동 1123-24번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 3개소(B=8~12m, L=316m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,899백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,899	4,899
국 비	2,133	2,133
시 비	1,224.75	1,224.75
구 비	1,541.25	1,541.25

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70 %)

○ 2015 도활사업 공모 신청하여 2015 올해부터 연차별 예산 확보

○ 2015년 예산(국비 250, 시비 125, 구비 125)

○ 2016년 예산(국비 698, 시비 349, 구비 349)

○ 2017년 예산(국비 293, 시비 146.5, 구비 146.5)

○ 2018년 예산(국비 463, 시비 231.5, 구비 231.5)

○ 2018년 5월 : 사업시행변경인가

○ 2018년 6월 : 정비기반시설조성 사업비 926백만원 지원(구→LH)

○ 2019년 6월 : 정비기반시설조성 사업비 858백만원 지원(구→LH)

○ 2020년 2,12월 : 정비기반시설조성 사업비 633백만원 지원(구→LH)

□ 향후계획

○ 2023. 상반기 : 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유): 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 4,685백만원 ⇒ 변경 4,899백만원

○ 변경사유 : 2019년 인센티브 반영 [총214백만원 (국107 시53.5 구53.5)]

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

하천복개구조물 재해예방사업

담당자

건설과 김민건(☎605-4684)

□ 사업목적 및 필요성

○『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』의 규정에 따라 복개구조물의 현재 상태를 정확히 판단하고 최초 및 이전에 기록된 상태로부터의 변화 확인과 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족하고 있는지 확인하며, 상태 평가를 실시하여 문제점과 개선점을 검토하고 시설물의 기능과 안전을 유지하고 재해 및 재난의 예방을 목적으로 함.

□ 사업개요

○ 기  간 : 2002 ~ 계속

○ 위  치 : 관내 하천 복개구조물 일원

○ 규  모 : 구조물 보수·보강 및 정밀점검·안전진단 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,256백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021	2022년	2023년	2024년이후
계	23,256	21,546	130	380	600	600
국 비
교 부 세	2,412	2,412
시 도 비	18,924	17,724		200	500	500
시군구비	1,920	1,410	130	180	100	100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2021년 : 정밀점검용역(부전천, 전포천) 완료

□ 향후계획

○ 지속적인 구조물 점검 시행 및 정비사업 계속 추진

○ 정밀점검용역 결과를 토대로 복개구조물 정비공사 추진

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부암3동∼당감1동간 도로개설사업

담당자

건설과 반동현(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동, 부암동 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2005~2021

○ 위  치: 부암동 387-2번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=200m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,375	3,902	473
국 비	600	226	374
시 비	250	250
구 비	3,525	3,426	99

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `19. 12.: 보상 완료(1차)

○ `20.  2.: 협의보상 실시(2차)

○ `20.  6.: 수용재결 신청(2차)

○ `20.  7.: 공사 착공

○ `20.  9: 수용재결 완료(2차)

○ `21.  8.: 공사 준공

○‘21. 12.: 지적공부 정리 및 공사완료 공고

□ 향후계획

○ 사업완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

범천동 동일아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 유영모(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동일아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2014년~2022년 이후

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 동일아파트 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=240m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	7,840	2,040		5,800
국 비
시 비
구 비	6,840	1,040		5,800
교 부 세	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ‘16.11. : 1차공사(지장물 철거 4동) 준공

○ ‘17. 7. : 2차공사(도로개설 L=18m) 준공

○ ‘18.10. : 3차공사(도로개설 L=100m) 준공

○ ‘19. 3.~‘20. 5. : 실시설계용역(수탁공사추진을 위하여 타절정산)

○ ‘20. 6. : 실시계획변경고시(전구간 고시) 및 보상협의(한국철도시설공단)

□ 향후계획

○ ‘22.  1. ~ : 건널목 2개소 존치 방안 협의 진행(국가철도공단)

○ ‘22.  4. : ’22년 1차추경 편성 요구(보상 및 공사비, 5,800백만원)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 도로개설 관련 국가철도공단 협의 결과 경부선을 횡단하는 철도건널목 신설시 기존 철도건널목 폐쇄 조건부승인

- 기존건널목 일원 주민들의 반대로 사업추진 어려움

- 건널목 2개소 존치하는 방안에 대해 국가철도공단과 지속협의

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 6,040백만원 → 변경 7,840백만원(증 1,800백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 동평상가아파트 일원 도로개설

담당자

건설과 김민현(☎605-4696)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2015.~2022.

○ 위  치: 부산진구 동평로96번길 18(당감동) 일원

○ 규  모: 도로개설 L=220m, B=8m(L=57m 완료, L=163m 미완료)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	6,000	3,984	1,202	814
국 비
시 비	500	500
구 비	5,500	3,484	1,202	814

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 70%)

○ `18.  4.: 1차 공사 준공(L=57m, B=8m)

○‘20. 3.: 동평상가 구조안전진단용역 착수

○‘20. 5.: 도시관리계획(시설: 도로) 변경

○‘20. 6.: 동평상가 구조안전진단용역 완료 및 실시계획 고시

○‘20. 7.~: 보상협의(L=163m, B=8m)

○‘21.10.~: 도시관리계획(시설: 도로) 변경결정(경미한변경)

□ 향후계획

○‘22. 5.~: 예산확보 후 보상협의 및 공사 발주 예정(L=163m)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

도시재정비촉진사업 지원(새싹로)

담당자

건축과 김소양(☎605-4614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설(도로) 우선 설치로 시민공원주변 재정비촉진사업의 조속추진 유도

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 1 ~ 2021 5.

○ 위  치 : 새싹로 일원(시민공원로~부암교차로)

○ 규  모 : 도로확장 L=380m, B=20~25m→40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,429백만원(보상 38,729, 공사 6,700)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	45,429	45,229	200
국 비	33,393	33,393
시 비	10,658	10,458	200
구 비	1,378	1,378

□ 추진상황(준공 : 100%)

○ 2016. 1~3월 : 지장물건 조사

○ 2017.  6월 : 보상완료

○ 2017. 12월 : 지장물 철거공사 착공

○ 2018. 12월 : 지장물 철거공사 준공

○ 2019.  6월 : 문화재입회조사 완료 및 공사발주

○ 2019.  7월 : 새싹로 확장 착공

○ 2020. 11월 : 공사 부지 내 오염토 정화 완료

○ 2021.  5월 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 사업완료

□ 문제점 및 대책(부진사유): 해당없음

□ 사업변경 내역: 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

어린이대공원∼사직동간 도로개설

담당자

건설과 장효진(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초읍동 어린이대공원~대진아파트 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2004.~2022.

○ 위  치: 초읍동 어린이대공원 ~ 대진아파트 입구

○ 규  모: 도로개설 L=600m, B=25m(L=413m 완료, L=187m 미완료)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,860백만원 [예산현액 994백만원(명시 294, 당해(특교금) 700)]

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	22,860	17,816	4,050	994
국 비
시 비	10,660	10,660
구 비	11,700	7,156	3,550	994
교 부 세	500		500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ '04.~’18.: 도로개설 완료(L=413m)

○ `21. 11.: 미완료 구간 보상완료(L=187m)

○ `21. 12.: 예산확보(특교금 700백만원)

□ 향후계획

○ ’21.  2.: 공사발주

○ `22. 12.: 공사준공

□ 문제점 및 대책(부진사유), 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

전포동∼서면아파트일원도로개설

담당자

건설과 유영모(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진남로와 연결되는 서면아파트 주변 교통수요 증가에 따른 도로망 확충

○ 장기간 도로 미개설로 인한 민원 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016년~2022년

○ 위  치 : 전포2동 산99-46번지, 33-351번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=160m, B=8~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	3,230	2,500	687	43
국 비
시 비
구 비	3,230	2,500	687	43

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘19.  1.: 주차선 제거 및 차선도색(L=70m구간)

○ ‘19. 10.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수

○ ‘20.  5.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 완료

○ ‘20.  7.: 공사 착공 및 일시정지(2020.7.16.보상미완료)

○ ‘21.  3.: 수용재결(2필지,지장물2건) 및 공사 일시중지 해제

○ ‘21.  9.: 공사 준공

□ 향후계획

○ ‘22.  1.: 도시정보시스템 DB구축용역 발주

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 3,200백만원 → 변경 3,230백만원(증 30백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

가야동 568-7번지 일원 도로개설

담당자

건설과 유영모(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019 ~ 2022

○ 위  치 : 부산진구 가야동 568-7번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=270m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,950	4,800	101	49
국 비
시 비	500	500
구 비	3,950	3,800	101	49
교 부 세	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘18.  1.: 본예산(22억원) 확보 및 실시설계용역 착수

○ ‘18.  4.: 실시설계용역 완료

○ ‘18.  6.: 보상협의

○ ‘18. 11.: 2회추경(8억원) 확보

○ ‘19. 12.: 수용재결 보상완료(공탁)

○ ‘20.  7.: 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘22.  6.: 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 4,800백만원 → 변경 4,950백만원(증 150백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

행복문화센터(개금3동사) 건립

담당자

개금3동 유하늘(☎605-6932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 39년 이상되어 노후 된 동사를 행복문화센터로 건립하여 주민들에게 쾌적한 환경을 조성하고 효율적인 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 7월 ~ 2021년 12월

○ 위  치 : 부산진구 개금동 428-8번지

○ 규  모 : 부지 517㎡, 연면적 1,611.51㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 사업비 : 4,184백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,184	1,536	2,648
국 비
시 비	600	381	219
구 비	2,784	1,090	1,694
교 부 세	800	65	735

※ 확보예산: 4,239백만원(특교세 800, 시비 600, 구비 2,839)

※ 집행예산: 4,184백만원(특교세 800, 시비 600, 구비 2,784) / 집행잔액 55백만원(구비)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017년 : 개금3동 복합동사 건립 계획 수립, 주민설명회 개최, 구의회 공유재산관리계획 심의, 부산시 투자사업 심사 승인

○ 2018년 : 사업부지(구거) 매입

○ 2019년 : 사업부지 도시관리계획 용도지역 변경(제3종일반주거지역➝준주거지역)

○ 2020년 : 설계완료, 동사 이전 및 철거, 신축공사 착공

○ 2021년 : 신축공사 준공, 기타 부대작업 완료

□ 향후계획: “사업완료”

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경(2020년)	현재(2021년)
사업기간	2017년~2019년	2017년~2021년	좌동
총사업비	3,761백만원	4,159백만원	4,184백만원
변경사유	공사비 기준단가 인상 반영(1,970천원/㎡➝2,569천원/㎡)		인테리어 등 추가 소요비용 반영

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부암동 백양대로34번길 도로개설

담당자

건설과 반동현(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역의 도시기반시설(도로)을 확충하여 지역 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018~2022

○ 위  치 : 부산진구 부암동 백양대로34번길 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=220m, B=6~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	3,200	2,017	883	300
국 비	1,450	1,375	75
시 비	725	423	302
구 비	1,025	219	506	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `17.  12.: 주한미군 공여구역 주변지역 지원 사업 선정

○ `19.   1.: 2019년 본예산 반영(국비 500 시비 250 구비 250)

○ `20.   1.: 2020년 본예산 반영(국비 500 시비 250 구비 250)

○ `20.  12.: 보상완료(전구간)

○ `21.   5.: 공사 착공

□ 향후계획

○ `22.   2.: 공사 준공(소로3-2, 3-385호선)

○ `22.   2.: 공사 착공(소로2-33호선)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 백양대로68번길 일원 도로개설

담당자

건설과 윤항재(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후, 불량 주택밀집 지역 내 도시기반시설을 확보하고 화재 등 긴급상황 발생 시 차량 진입이 가능토록 하여 열악한 환경개선하여 장기 미집행 도로개설로 주민숙원사업 해소 및 지역균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018. ~ 2021.

○ 위  치 : 부산진구 당감동 백양대로68번길 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=150m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,159백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,159	3,369	790
국 비
시 비
구 비	4,159	3,369	790

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ ‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○ ‘18. 10.: 실시설계용역 완료

○ ‘19.  9.: 실시계획 고시(L=210m)

○ ‘20.  8.: 공사 착공

○ ‘21. 10.: 공사 준공

○ ‘21. 10.: 도로 사용개시

○ ‘21. 12.: 도시계획시설(도로) 공사완료공고

□ 향후계획

○ 사업완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업 구간 내 공사비 설계변경(정산)과 산정보상금이 실보상금가 차이 및 국유지(국토부) 무상사용에 따라 보상금 감액(4회 추경 반영)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 사 업 비	4,740	4,159	감 581
공 사 비	800	686	감 114
보 상 비	3,920	3,454	감 466
기 타	20	19	감 1

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 725-1번지 일원 도로개설

담당자

건설과 윤항재(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을  확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량 진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018. ~ 2022.

○ 위  치 : 부산진구 당감4동 백양순환로 12 ~ 당감서로 63 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=295m,  B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	5,900	4,894	606	400
국 비
시 비
구 비	5,900	4,894	606	400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○‘18.  6.: 실시설계용역 착수

○‘18. 12.: 실시설계용역 완료

○‘20.  6. ~ ‘21.  1.: 1차 구간 공사 착공 및 준공(L=160m, B=8m)

○‘21.  7.: 2차 구간 공사 착공(L=90m, B=8m)

□ 향후계획

○‘22.  3.: 2차 구간 공사 준공(L=90m, B=8m)

○‘22.  4~.: 3차 구간 공사 착공(L=45m, B=8m)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 감정평가시 보상액이 당초 계획보다 증가되고 수용재결 및 이의재결에 따른 보상비 증가

구 분	당 초	변 경	증·감
총 사 업 비	5,000	5,900	-
공 사 비	1,000	1,000	-
보 상 비	3,960	4,860	증 900
기 타	40	40	-

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 624-689번지 일원 도로개설

담당자

건설과 장효진(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 624번지 일원 주택밀집지역의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2018년~2021년

○ 위  치: 당감4동 동평로39번길 52 일원

○ 규  모: 도로개설 L=136m, B=8m

○ 착공일: 2020. 3.

○ 준공일: 2021. 4.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 1,900백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,900	1,613	287
국 비
시 비
구 비	1,400	1,113	287
교 부 세	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ ’18. 10.: 실시설계용역 완료

○ ’20.  3.: 공사 착공

○ ’20.  8.: 보상 및 이주완료

○ ’20. 10. ~ 12.: 지장물 이설 완료

○ ’21.  4.: 공사 완료

□ 향후계획

○ 사업완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

범천4동 1104번지 일원 도로개설

담당자

건설과 강정구(☎605-4705)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미개설에 따른 주변 기 개설도로와 비교 주민불만 해소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 범천2동 1104번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=120m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	2,800	416	1,884	500
국 비
시 비	2,300	143	1,657	500
구 비
교 부 세	500	273	227	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘19.  4. ~ ’20. 5. : 실시설계용역 완료, 실시계획(1, 2차구간) 고시

○ ‘21.  4. : 1차구간(L=45m) 이의재결 결과통보 및 추가 손실보상금 지급

○ ’21.  6. : 2차구간(L=75m) 수용재결 결과통보 및 공탁

○ ’21.  7. : 2차구간(L=75m) 주거이전 촉구 및 이의재결 절차이행

○ ‘21. 8. ~ 12. : 1차구간(L=45m) 지장건축물 철거

□ 향후계획

○ ‘22. 1. ~ 6. : 전체구간 이주 완료 및 공사착공

○ ‘22. 10. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 보상 및 주거이전 지연

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 동평로73번길 41 일원 도로개설

담당자

건설과 장효진(☎605-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 동평로73번길 41 일원 구간의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019.~2022.

○ 위  치 : 부산진구 당감동 744-15번지~730-81번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=170m, B=8m (1차 L=80m, 2차 L=90m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,820	1,695	1,004	2,121
국 비
시 비
구 비	3,920	1,695	1,004	1,221
교 부 세	900			900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `19.  5: 실시설계용역 완료

○ ‘21.  9: 공사 준공(1차)

□ 향후계획

○ `22.  6.: 보상 완료(2차)

○ `22.  7.: 공사 착공(2차)

○ `22. 12.: 공사 준공(2차)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 2차구간 일부 보상비와 공사비 예산 미확보로(1,000백만원) 향후 2022년도 추가경정 등 예산확보에 만전을 기하겠음.

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 당감로25번길 일원 도로개설

담당자

건설과 윤항재(☎605-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 지역 내 도시기반시설을 확충하고 화재 등 긴급상황 발생시 차량진입이 가능하도록 열악한 환경을 개선하고, 장기간 도로 미 개설에 따른 집단 민원 등을 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간: 2019. ~ 2022.

○ 위  치: 부산진구 당감동 440-2번지 ~ 430-12번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=210m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	5,800	2,331	669	2,800
국 비
시 비
구 비	5,200	1,731	669	2,800
교 부 세	600	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘19. 1.: 실시설계용역 착수

○ ‘19. 5.: 실시설계용역 완료

○ ‘20. 6.: 실시계획고시(L=110m)

○ ‘20. 6. ~ 21. 5.: 공사 착공 및 준공(L=110m)

□ 향후계획

○ ‘22. 1.: 잔여구간 보상협의(토지4, 건물3)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 잔여구간 사업비 미확보로 2022년 추가경정 등 예산확보에 만전을 다하겠음.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

백양 문화예술복합센터 건립

담당자

문화체육과 박선민(☎605-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 문화·예술·여가 활동공간 마련 및 활성화를 도모할 수 있는 기반 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2023. 07.

○ 위  치 : 부산진구 부암동 507-2 외 5필지

○ 규  모 : 부지 991㎡, 지상6층, 연면적 2,581.79㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	13.730	3,117	178	8,783	1,652
국 비
시 비	862			862
구 비	2,525			1,000	1,525
교 부 세	10,343	3,117	178	6,921	127

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 01. : 설계용역 착수

○ 2021. 02. : 설계용역 착수보고회 개최

○ 2021. 05. : 설계용역 주민설명회 개최

○ 2022. 01. : 설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2022. 02. : 공사 착공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ (문제점) 물가상승에 따른 건축비 단가 상승 등으로 공사비 지속 상승 예상

○ (대  책) 공기 단축 등으로 예산 절감(확보예산 범위 내 공사 추진)

□ 사업변경 내역

○ 사업예산(105.5억원 → 137.3억원), 건축규모(연면적 2,133㎡ → 2,581.79㎡)

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

(가칭)성지종합사회복지관 건립

담당자

희망복지과 허명숙(☎605-4314)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복지관의 혜택에서 소외된 연지·초읍 지역의 복지수요 충족

○ 지역주민에 대해 종합적인 복지서비스 제공 및 잘사는 행복도시 여건 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2023년(5년)

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 산 70-1번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 8,076㎡, 건물 2,034㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	14,500	945	2,721	9,834	1,000
국 비
시 비	2,800			2,800
구 비	10,700	51	2,615	7,034	1,000
교 부 세	1,000	894	106
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018년 09월 : (가칭)성지종합사회복지관 건립기본계획 수립

○ 2018년 11월 : 공유재산심의회 및 구 중기지방재정계획 반영

○ 2019년 1월~12월 : 복지관 부지배입비 등 건립예산 확보 및 편성

○ 2019년 12월 : 도시관리계획(초연공원 조성계획) 변경(결정)

○ 2020년 1월 : 부산광역시 도시공원위원회 심의 의결(조건부)

○ 2020년 5월 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 실시계획 인가 고시

○ 2020년 7월 : 건립공사에 다른 지반조사 용역 실시

○ 2020년 8월 : 보상금액 결정(건설과)

○ 2020년 10월 : 공유재산심의회 의결 및 공공건축사전검토 신청

○ 2020년 12월 : 공유재산관리계획 심의 의결, 공공건축심의위원회 심의

수용재결 신청(구→ 시 건설행정과)

○ 2021년 1월~2월 : 기술용역발주계획 심의(구 건축과 → 市 기술심사과)

○ 2021년 2월 : 설계용역 계약심사(구 건축과 → 市 청렴감사담당관)

○ 2021년 2월~4월 : 건축 설계공모 추진 및 심사완료(구 건축과)

○ 2021년 5월 : 건립 기본 및 설계용역 착수보고회

○ 2021년 5월 : 설계용역실시

○ 2021년 8월 : 중앙토지수용위원회 이의재결 진행중(변론기일 : 2022.1.20.)

○ 2021년 9월 : BF예비인증 신청(2022.2.인증예정)

○ 2021년 11월 : 건축물 에너지효율등급평가 예비인증 심사(2022.1.인증예정)

□ 향후계획

○ 2022년 상반기 : 도시계획시설사업 실시계획 인가,

실시설계용역(BF 예비인증 및 건축허가 포함), 계약심사

○ 2022년 하반기 : 공사발주 및 착공, 공사 준공(2023년)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 관련 법규(도시공원및녹지에관한법률시행규칙) 개정(19.10.23.) 지연

○ 토지 소유자와의 협의 불성립에 따른 손실보상 지연

(토지보상 관련 행정소송 및 토지보상 이의재결 진행중)

○ 사전 행정절차(공공건축 심의 및 도시관리계획 변경 등) 이행으로 추진 지연

□ 사업변경 내역

○ 토지보상비 상승, 지반조사 결과 및 평당 공사비 상승으로 공사비 상승, 용역(감리비 등) 및 물품 구입비 반영으로 총사업비 증가

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2019년 ~ 2022년	2019년 ~ 2023년
총사업비	8,960백만원	14,500백만원	증 5,540
보상비	3,360	3,800	증 440
공사비	5,600	9,220	증 3,620
기타(용역, 뭎품)	-	1,480	증 1,480

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부산진구 생활문화센터 조성

담당자

문화체육과 박선민(☎605-4064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 생활문화욕구 충족 및 동아리 활성화를 위한 주민자율공간 조성

○ 청소년들의 꿈과 창의적 사고를 펼칠 수 있는 독립공간 마련 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2021. 12.

○ 위  치 : 부산진구 당감동 751-3

○ 규  모 : 부지 249㎡, 지상5층, 연면적 481.57㎡

○ 착공일 : 2021. 01.

○ 준공일 : 2021. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,724백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,724	107	1,617
국 비	847	107	740
시 비	847		847
구 비	30		30

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 12. : 사업예산 확보

○ 2021. 01. : 공사 착공

○ 2021. 12. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 사업완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

동평중 개방형 다목적체육관 건립

담당자

문화체육과 이종하(☎605-4094)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개방형 다목적체육관 건립을 통해 다양한 체육수업을 실시하고 각종 행사 시 개최 장소로 활용할 뿐만 아니라 지역주민의 문화체육시설로도 활용하여 지역 사회 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 01. ~ 2022. 03.(27개월)

○ 위  치 : 부산광역시 부산진구 백양순환로 119번길 12-31(당감동)

○ 규  모 : 지상 3층(연면적 1,842㎡), 1층 필로티주차장, 2층 식당, 3층 강당

○ 착공일 : 2021. 05. 31.

○ 준공(예정)일 : 2022. 03. 19.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,956백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	3,956	3	3,684	269
국 비	900		900
시 비	300		300
구 비	300		300
교 부 세	1,951	3	1,948
민간자본
기 타	505		236	269

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2021. 01. : 설계용역 완료

○ 2021. 05. : 공사 착공 – 공사중

□ 향후계획

○ 2022. 03. 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

새뜰마을사업(다함께 안창) 추진

담당자

도시재생과 정재훈(☎605-6134)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심에서 고립된 지역특성상, 개발에서 소외되어 생활인프라 부족 등 주거
여건이 열악함

○ 호계천을 경계로 구분되는 동구의 안창마을이 새뜰마을 사업을 추진하고

있어 상대적 박탈감 야기하고 있으므로 해당사업을 통해 분위기쇄신 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위  치 : 범천2동 1544-54번지 일원 / 81,094㎡

○ 내  용 : 안전확보, 생활·위생 인프라 개선, 주택정비, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후	‘24연도 이후
계	5,690	1,313.4	2,352.9	2,023.7
국 비	3,983	839.8	1,783.6	1,359.6
시 도 비	512.1	5.7	298.5	207.9
시군구비	1,194.9	467.9	270.8	456.2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  65%)

○2020. 05. : 마을주차장 조성부지 매입

○2020. 07. : 집수리사업 추진계획 수립

○2020. 08. : 마스터플랜 국토부심의 통과, 민관협력형 노후주택개선사업

공모선정(해비타트), 주민쉼터 조성부지 철거완료

○2020. 10. : 위험목 정비완료(1차), 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 추진계획 수립

○2020. 12. : 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 계약체결, 주민커뮤니티센터 착공

○2021. 02. : 방재공원 및 주민쉼터 조성 완료

○2021. 03. : 고령자배려 골목길 정비공사 완료

○2021. 06. : 민관 협력형 노후주택 개선사업 완료

○2021. 06. ~ 11. : 방재 및 범죄예방환경개선 사업 실시설계 용역

□ 향후계획

○ ‘22. 1. : 안창마을 주민커뮤니티 센터 준공

○ ‘22. 2. : 공·폐가 3동 철거

○ '22. 상반기 : 방재 및 범죄예방환경개선사업 공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

(가칭)당감동 복합국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 김태근(☎605-4092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감·부암·개금 권역의 공공체육시설 지역 불균형 해소 및 다양한 연령층의 수요 충족

○ 지역의 열악한 주차 여건 해소를 위한 생활SOC복합형 체육시설 확충

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019. 07. ~ 2023. 06.

○ 위  치 : 당감동 257-16번지 외 7필지

○ 규  모 : 지하3층/지상7층 (연면적 6,554.36㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,966백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	19,966	2,980	2,202	4,939	9,845
국 비	5,000	328	1,372	1,000	2,300
시 비	3,333				3,333
구 비	11,633	2,652	830	3,939	4,212

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 03. : 생활밀착형 국민체육센터 공모사업신청 확정(단일형)

○ 2019. 07. : 지방재정 투자사업 심사(市)

○ 2019. 10. : 생활SOC복합 국민체육센터 사업 선정(복합형)

○ 2021. 03. : 설계완료

○ 2021. 06. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 06. : 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 공사차량 출입에 따른 교통 혼잡, 터파기 공사 등 민원 발생에 따른 지연

○ 신호수 추가 배치, 공사 안전관리 및 공정관리 강화 필요

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 결과 총사업비 증액 : 기존 18,761백만원, 변경 19,966백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

가야1동 256-13번지 일원 도로개설

담당자

건설과 유영모(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 가야1동 256-13번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=130m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,980	30	-	1,950
국 비
시 비
구 비	1,980	30	-	1,950

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

❍ ‘20.  1. : 2020년도 본예산확보(구비 30백만원)

❍ ‘20.  1. ~ 7. : 실시설계용역

□ 향후계획

❍ ‘22.  4. : 사업비 확보

❍ ‘22.  6. : 보상협의 진행

❍ ‘22.  9. : 공사 착공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

❍ 사업비 확보 지연에 따른 전체 사업 지연

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 689번지 일원 도로개설

담당자

건설과 김민현(☎605-4696)

□ 사업목적 및 필요성

○ 당감동 689번지 일원 주택밀집지역의 도시기반시설 도로를 확충하여 지역       균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간: 2020.~2023.

○ 위  치: 당감동 689번지 일원

○ 규  모: 도로개설 L=245m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	5,900	50	9	2,241	3,600
국 비
시 비
구 비	5,900	50	9	2,241	3,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ’20.  7.: 실시설계용역 완료

○ ’21. 11.: 예산확보(4회추경 2,000백만원)

○ ’21. 12.: 도시계획시설사업 실시계획 변경고시

□ 향후계획

○ `22.  1.~: 보상 진행

○ `22.  9.: 공사 착공 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

커뮤니티하우스 ‘도란도란’ 건립

담당자

희망복지과 박현규(☎605-4317)

□ 사업목적 및 필요성

○「부산진구 지역사회통합돌봄 선도사업」추진에 따른 기반시설 조성 필요

○ 주거 외 다기능(복합) 공간 연계로 초고령화사회 대비 미래형 주거모형 개발

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020.1월 ~ 2021.10월 [1년10월]

○ 위  치 : 부산진구 초읍동 376-54번지 외 1필지

○ 규  모 : 부지 333㎡, 연면적 733.16㎡, 지하1층 / 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,871백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자.	‘21연도	‘22연도	‘23연도	‘24연도
계	2,871	1,201	1,670
국 비	1,000	400	600
시 도 비	500	202	298
시군구비	1,371	599	772

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.11월 : 건축허가(공용건축물 신축 허가) 승인

○ 2020.12월 : 공사계약 체결

○ 2021. 1월 : 공사 착공

○ 2021.10월 : 준공

□ 향후계획

사업완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업예산	2,000백만원	2,477백만원
사업기간	2020.1월 ~ 12월	2020.1월 ~ 2021.10월

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

전포어울더울 복합문화센터 건립

담당자

여성가족과

김종원(☎605-4374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국공립어린이집을 중심으로 공공형키즈카페, 작은도서관, 주민소통공간 등       다기능 복합건물을 건립하여 양질의 보육환경을 조성하고 주민생활의          질 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021.4. ~ 2022.10.

○ 위  치 : 부산진구 서전로58번길 143(舊 전포3동사)

○ 규  모 : 지상3층, 연면적 697㎡

- 1층 : 국공립 어린이집

- 2층 : 공공형 키즈카페

- 3층 : 작은도서관, 주민소통공간 (프로그램실 활용 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,592.8백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘21연도	‘22연도	‘23연도	‘24연도
계	3,592.8		22.1	3,570.7
국 비	289		3	286
교 부 세	600		10.1	589.9
시 도 비	59		0.9	58.1
시군구비	2,644.8		8.1	2,636.7

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 완료

○ 기존 건물 철거 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 02. 착공

○ ‘22. 10. 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

양정복합공공도서관 건립

담당자

평생교육과 고이현(☎605-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육과 보육을 함께 영위하는 지역 문화공동체 커뮤니티 시설 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위  치 : 부산진구 양정동 506-6외 1필지

○ 규  모 : 부지 1,023.4㎡, 연면적 2,203.98㎡, 지하1~지상4층

○ 착공일 : 2022. 2월경

○ 준공일 : 2023. 8월경

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,965백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	9,965	363	38	9,564
국 비	2,579		38	2,541
시 비	1,284			1,284
구 비	6,102	363		5,739
교 부 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 생활SOC복합화 사업 ‘양정복합공공도서관 건립’ 선정

○ 인근 부동산 매입 완료(양정동 506-30)

○ 부산진구 기적의도서관 건립 협약, 설계용역 완료

○ 건립공사 발주

□ 향후계획

○ ‘22. 2. 착공 (‘23.8. 완공예정)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 기적의도서관 설계(연면적 증가) 바탕의 총사업비(구비부분) 증액

(5,463백만원→9,965백만원) 증4,502백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

전포2동 복합문화센터 건립

담당자

전포2동 전은진(☎605-6664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 동사는 노후하고 협소하여, 주민불편이 크므로 복합 용도의 공공청사를

건립하여 주민이 만족하는 행정·복지 서비스를 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~2023년

○ 위  치 : 전포동 175-26번지

○ 규  모 : 지상6층, 대지면적 348.1㎡, 연면적 1,153.65㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	4,997	0	194	454	4,349	0
국 비	412	0	174	238	0	0
시 비	150	0	0	150	0	0
구 비	3,435	0	20	66	3,349	0
교 부 세	1,000	0	0	0	1,000	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ `19.07. : 전포2동사(복합센터) 건립계획안 보고

○ `19.10. : 부산시 지방재정투자심사 승인

○ `20.10. : 사업 부지 결정

○ `20.11. : 부산진구 공유재산 관리계획 승인

○ `21.01.~ `21.02. : 공공건축 사업계획사전검토 및 공공건축위원회

○ `21.04.~ `21.07. : 설계공모

○ `21.07.~ `21.12. : 설계용역 및 준공, 건립공사 계약

□ 향후계획

○ `22.01. ~ `22.03. : 임시동사 이전, 현동사 철거

○ `22.04. ~ `23.03. : 건립공사(12개월)

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	당초	현재	비고
위치	전포동 175-26번지외 1필지	전포동 175-26번지
대지면적/연면적	605㎡/2,687㎡	348.1㎡/1,153.65㎡
규모	지하2층/지상4층	지상6층

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감복합공공도서관 건립

담당자

평생교육과 고이현(☎605-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육과 문화를 함께 영위하는 지역 문화공동체 커뮤니티 시설 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위  치 : 부산진구 당감동 93-17

○ 규  모 : 부지 439㎡, 연면적 1,391.34㎡, 지하1층 ~지상6층

○ 착공일 : 2022. 5월경

○ 준공일 : 2023. 11월경

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,382백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	7,382		213	7,169
국 비	2,950		213	2,737
시 비	1,475			1,475
구 비	2,957			2,957
교 부 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공유재산 심의회 및 관리계획 의결, 지방재정 투자심사 완료

○ 건축 설계 공모 및 설계 용역사 선정 완료

□ 향후계획

○ ‘21. 7. 설계용역 착수

○ ‘22. 5. 착공 (‘23. 11. 완공예정)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 공사비 지수 상승률 반영 및 감리비 등 건축비 상승에 따른 예산(구비)확보       필요

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견 바탕의 총사업비(구비부분) 증액

(5,900백만원→7,382백만원) 증1,482백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

가야2동사(청소년 문화센터) 건립

담당자

가야2동 최상규(☎605-6857)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30여년 된 노후·협소한 동사를 청소년 문화센터와 복합청사로 건립하여        청소년을 비롯한 지역주민에게 쾌적한 문화시설 및 효율적인 행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 가야동 519-1번지

○ 규  모 : 지하1층/지상5층, 대지면적 719.5㎡, 연면적 1,858.35㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,019백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	7,019	2,078	2,994	1,947
국 비	1,700		1,700
시 비	316		166	150
구 비	5,003	2,078	1,128	1,797

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2020년 12월 시공사 선정 및 계약

○ 2021년 1월 착공

□ 향후계획

○ 2022년 1월 21일 준공(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

당초 사업(현 동사부지에 동사건립)	변경된 사업(신규매입부지에 동사건립)
사업위치 : 부산진구 가야2동 601-7외 4필지 사 업 량 : 부지 889㎡, 연면적 1,320㎡ 총사업비 : 3,557백만원	사업위치 : 부산진구 가야동 519-1번지 사 업 량 : 부지719.5㎡, 연면적 1,828.35㎡ 총사업비 : 7,019백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부암1동 도시재생 뉴딜사업

담당자

도시재생과 엄지연(☎605-6135)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후취약주택 정비를 통한 주민의 일상적인 삶의 질 제고

○ 생활환경개선 및 거점 시설 설치를 통한 생활 편의시설 확충

○ 주민간 소통으로 지속가능한 공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년~2022년(4년)

○ 위  치 : 부암동 321-128번지 일원

○ 규  모 : 49,734㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황 (※ 이월포함)

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	8,500	5,057	1,596	1,847
국 비	4,000	2,873	408	719
시 비	2,000	894	413	693
구 비	2,500	1,290	775	435

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 공유주차장 준공(20년 9월)

○ 도시재생 주민대학 수료 기본 및 심화과정(38명 수료)

○ 재해위험시설 정비공사 중 (21년 10월 완료)

○ 집수리 아카데미 기본 및 심화과정(21년 10월 완료, 수료 51명 수료)

○ 노후주택정비사업(1차) 완료 (21년 11월 완료)

○ 공유센터 준공 (21년 12월)

□ 향후계획

○ 숨트는 길 정비 완료 등 H/W사업 추진

○ 동네복지 프로젝트 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 연장 : 당초 2019년 ~ 2021년 → 변경 2019년 ~ 2022년

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

개금3동 가야대로507번가길

일원 도로개설

담당자

건설과 권용범(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

○ 도시기반시설 확충으로 주택가 이면도로 확보

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019 ~ 2023

○ 위  치 : 개금3동 가야대로507번가길 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=650m, B=8~10m

○ 착공일 : 보상 미완료

○ 준공일 : -

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	8,000	383	1,164	3,166	3,287	-
국 비	4,000	200	604	1,394	1,802	-
시 비	2,000	100	22	697	1,181	-
구 비	2,000	83	538	1,075	304	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

❍ ‘19. 08. : 실시설계용역 완료(1차 L=160m) ※ 용역사: ㈜우성종합기술

❍ ‘20. 01. : 실시계획 고시(1차 중L=60m)

❍ ‘20. 01. : 기본 및 실시설계용역 착수(2차 L=490m) ※ 용역사: ㈜한가람

❍ ‘20. 06. : 도시계획시설사업 실시계획 변경고시(L=60m→650m)

❍ ‘20. 11. ~ ’22. 1. : 철도공단 협의완료, 보상추진(욱토개발 등) 중

□ 향후계획

❍ 미개설구간 보상, 공사 시행 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 2-31호선 구간 중 국토교통부 소유 2필지가 철도사면 구간으로, 국가철도공단과 사면안전성 검토 등 협의기간 소요로 보상절차 지연

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

전포2동 밭개마을 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 정재훈(☎605-6134)

□ 사업목적 및 필요성

○ 열악한 주거환경 및 생활 인프라를 개선하고 주민 공동체 활동지원 등을       통해 쇠퇴하는 마을 재생 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

○ 위  치 : 부산진구 전포동 175-2번지 일원

○ 규  모 : A=58,601.3㎡

○ 내  용 : 골목길 정비, 커뮤니티시설 조성, 노후주택 개보수,

주민역량강화 및 공동체 활성화 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	5,750	187	764.1	3,183.1	1,615.8	-
국 비	4,025	167.6	502.7	2,223.7	1,131	-
시 비	517.5	5.8	68.2	298	145.5	-
구 비	1,207.5	13.6	193.2	661.4	339.3	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ '20. 6.~ `21. 6. : 마스터플랜 수립 용역 시행

○ '20. 8.~11. : 편안길 조성사업 실시설계 용역 완료

○ '21. 6. : 공·폐가 정비지 내 주민쉼터 조성(1개소)

○ '20. 11.~ `21. 10. : 공·폐가 정비사업 시행(11개동)

○ '21. 7.~11. : 지킴이 공원 실시설계용역 진행

○ '21. 9.~12. : 민·관·학 협력형 도시혁신스쿨 in 부산 시행(80여명)

○ '21. 10. : 민·관 협력형 노후주택 개선사업 시행(32세대)

○ '21. 12. : 지킴이공원, 편안길 조성 공사 착공

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 거점시설 부지 매입 및 조성 등 지연

⇒ 토지매입 및 주민 의견 수렴하여 22년초 거점시설 실시설계 예정

□ 향후계획

○ ‘22. 1. : 주민역량강화 및 휴먼케어 착수 및 시행

○ ‘22. 상반기 : 도시가스 공급관로 신규 설치 및 인입관로 설치 시행 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

당감동 474-2번지 일원 도로개설

담당자

건설과 반동현(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 일몰제 대비로 도시기반시설을 확보하여 지역 균형 발전 및 관내       가로망 체계 유지

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년~2022년

○ 위  치 : 당감동 474-2번지 ~ 445-1번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=106m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,900	1,077	823
국 비
시 비
구 비	1,900	1,077	823

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘21.  1. : 지장물 변경조사(2차)

○ ‘21.  6. : 수용재결 신청(2차)

○ ‘21.  6. : 공사 착공(일시중지 일자 : 2021.7.20.)

○ ‘21. 12. : 이의신청 접수(2차)

□ 향후계획

○ ‘22. 3. : 보상 완료(2차) 및 공사 재개

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 보상 불만족으로 인한 사업기간 연장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

재활용선별장 시설 현대화 사업

담당자

청소행정과 김동욱(☎605-4802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기적으로 해결가능한 지하화를 통한 친환경 재활용선별장 시설

현대화 사업 필요

○ 구군 재활용 처리능력 강화로 공공선별률 제고

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2027년

○ 위  치 : 부산진구 가야대로 407(현 재활용사업소)

○ 규  모 : 50톤/일(처리율 22%, 반입량 약 33톤)

○ 착공일/준공일 : 2025년/2027년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,952백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	5,952					5,952
국 비
시 비	3,571					3,571
구 비	2,381					2,381

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 타당성 조사 용역 : 2019년

○ 국․시비 예산 반영 사전심사 및 투자 심사 : 2020년

□ 향후계획

○ 타당성 조사 용역(지하화) : 2022년

○ 국․시비 예산 반영 사전심사 및 투자 심사(지하화) : 2023년

○ 사업예산 확보, 기본 및 실시 설계 : 2024년

○ 계약심사 후 사업발주 및 착공 : 2025년

○ 시설공사 준공 및 가동 : 2027년

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 재활용선별장 지하화 추진을 위한 계획 재수립

○ 재활용선별장 가동 중단으로 유휴 인력 발생 및 재활용품 반입 중단

- 공무직(환경관리원) 13명은 다른 작업현장 배치 등 조치 필요

- 재활용품은 부산시 자원재활용센터 반입 협의 또는 민간업체 선정 필요

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

가야1동 60-11번지 일원 도로개설

담당자

건설과 유영모(☎605-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 차량 통행 가능한 도로가 없어 각종 생활불편사항 호소

○ 주거밀집지역 도로개설에 따른 주거환경개선 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위  치 : 부산진구 가야1동 60-11번지 일원

○ 규  모 : 도로개설 L=100m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	2,900	1,500	1,075	325
국 비
시 비
구 비	2,900	1,500	1,075	325

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 완료)

❍ ‘20.  1. : 2020년도 본예산(1,500백만원) 확보

❍ ‘20.  1. : 실시설계용역 착수

❍ ‘20.  6. : 실시계획고시

❍ ‘20.  6. : 실시설계용역 완료(※ 용역사: HK이앤씨)

❍ ‘20.  6. : 공사 착공

❍ ‘20.  7. : 공사일시정지(2020.7.8.보상미완료) 및 보상협의

❍ ‘21.  1. : 2021년도 본예산(1,400백만원) 확보

❍ ‘21. 12. : 보상완료

□ 향후계획

❍ ‘22.  1. : 공사일시정지 해제 및 공사 시행

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부암동 670-9번지 일원 도로확장

담당자

건설과 반동현(☎605-4695)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부암동 670-9번지 일원 우회전 차선 확보를 통해 주택밀집지역의 교통혼잡 해소

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021년~2022년

○ 위  치 : 부암동 670-9번지 일원

○ 규  모 : 도로확장 L=55m, B=5→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	2,300	16	34	2,250
국 비
시 비
구 비	2,300	16	34	2,250

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ’20. 12.: 실시설계용역 착수

○ `21.  6.: 용역 일시정지

□ 향후계획

○ `22.  1.: 도시계획위원회 상정

○ `22.  2.: 도시계획시설(도로) 결정 및 실시설계 완료

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

범천2동 도시재생 뉴딜사업

(삶의 불빛을 잇다 호천르네상스)

담당자

도시재생과 정창주(☎605-6132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 경사형 주거지의 특성을 고려한 물리적 환경개선과 함께

사회․경제적 활성화를 포함하는 도시재생사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021년~2024년(4년)

○ 위  치 : 부산진구 범천동 1525-10번지 일원 138,880㎡

○ 사업내용 : 노후주거지 재정비, 공동체 활성화, 마을기업 육성등

- 행복주택 조성사업 등(8개 단위사업, 21개 세부사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,477백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	28,477	1,047	1,013	9,640	5,000	11,777
국 비	9,500	-	952	4,273	2,000	2,275
교 부 세	-	-		-	-	-
시 도 비	4,750			2,602	1,000	1,148
시군구비	4,750	166	61	2,621	1,000	902
지 방 채	1,000	-		-	1,000	-
민간자본	44			44
기 타	8,433	881		100		7,452

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

○ 국토교통부 특위 심의 선정(20.12월)

○ 활성화계획 고시(21.04월)

○ 스마트 미니농장 등 4개 부지 확보(21.04월)

○ 경관가이드라인 용역 착수(21.04월)

○ 주거환경개선계획 변경 및 온마을 돌봄센터 기본구상 용역 착수(21.04월)

○ 총괄코디네이터(센터장) 임명․교체(21.06월)

○ 호천마을 엘리베이터 조성사업 실시설계용역 착수(21.7월)

○ 스마트 미니농장 스마트 큐브 발주(21.12월)

□ 향후계획

○ 주민공모사업 등 SW사업 추진

○ 행복주택 조성 관련 관계기관 및 주민 협의

○ 엘리베이터 조성 및 방재공원 조성 등 HW사업 추진

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부산진지역자활센터 매입 이전

담당자

희망복지과 이주영 (☎605-4332)

□ 사업목적 및 필요성

○안정된 거점시설을 확보하여 자활촉진 사업의 핵심 인프라 역할 수행

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ~ 2021. 11.

○ 위  치 : 부산광역시 부산진구 새싹로 251 (초읍동)

○ 규  모 : 대지면적 374.9㎡, 연면적 730.17㎡지상5층

○ 착공/준공일 : 2021. 1. 8./10. 31.(매입일: 1.8./ 공사착공: 8월)

○ 사업완료 : 2021. 11. 12.(부산진지역자활센터 이전 완료)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	2,750		2,750
국 비
시 비
구 비	650		650
기 타	2,100		2,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공유재산심의회 심의 의결 ................................................... 2020. 10. 28.

○ 2020년 3차 자체 투자심사(서면) ......................................... 2020. 11.

○ 공유재산 관리계획안 의회 심사 ......................................... 2020. 11.

○ 2021년도 자활기금 의회 심사 ............................................ 2020. 12.

○ 부동산 취득 매입계약 및 등기 .......................................... 2021. 1. ~ 2.

○ 실시설계용역 착수 .............................................................. 2021. 2. 19.

○ 공사(소방, 리모델링) 착공 ................................................  2021. 8.

○ 공사(준공)완료 ...................................................................  2021. 10. 31.

○ 준공검사일 ........................................................................  2021. 11. 5.

○ 부산진지역자활센터 이전 완료 .......................................  2021. 11. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

시설현대화(개금골목시장 고객지원센터)

담당자

일자리경제과

박순재 (☎ 605-4492)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장인 개금골목시장 내 고객지원센터 건립을 추진하여 전통시장의 경       쟁력 강화 및 지역경제활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 10월 ~ 2022. 3월

○ 위  치 : 부산진구 복지로 13번길 67-4(개금골목시장 내)

○ 규  모 : 지상 3층, 연면적 285㎡, 사무실, 회의실, 화장실, 교육장, 주차면 등

○ 착공일 : 2021. 10. 18.

○ 준공일 : 2021. 3. 16. (건축·기계) ▷ 전기·통신·소방 : 2022. 4. 24.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,392백만원(시비 1,234백만원, 구비 158백만원) - 부지매입비 포함

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,392	2	906	484
국 비
시 비	1,234	2	844	388
구 비	158		62	96
교 부 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건축 골조 완료 예정(1.28.), 건축 공정율(25%)

○ 건축·전기·소방 선금 지급 완료(21년 12월)

□ 향후계획

○ 3층 천장 콘크리트 타설(1. 20.), 건물 외벽 창호 설치(21년 2월)

○ 건축 일정에 따라 전기(1.14., 1.19.)·통신·소방 공사 배선 작업 추진

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 당초 당해 사업의 사업비를 변경·승인하여 10월 이후 추진하는 사업

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

시설현대화(부전상가7차 아케이드)(전환사업)

담당자

일자리경제과

박순재 (☎ 605-4492)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장의 시설현대화를 통해 영세상공인 근로 환경 개선을 통한 시장

경쟁력 확보 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 4월 ~ 2022. 1월

○ 위  치 : 부산진구 부전로 170번길 15 및 부전로 174번길 29 일원

○ 규  모 : L=92.51m,B=4~8.9m,A=711.422㎡ & L=25.8m,B=3~5m,A=102.69㎡

○ 착공일 : 2020. 12. 28.

○ 준공일 : 2021. 12. 7.(건축) (▷ 전기 10. 7. ▷ 통신 12. 9. ▷ 소방 12. 31.)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,250백만원(시비 937.5백만원, 구비 187.5백만원 자부담 125백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,250	38	1,078	134
국 비
시 비	937.5	29	810	98.5
구 비	187.5	6	163	18.5
교 부 세
민간자본	125	3	105	17

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 부전상가 7차 아케이드 사업 완료

□ 향후계획

○ 부전상가 7차 아케이드 집행 정산 보고

○ 집행잔액 활용 공용화장실 개선 사업 추진 중(2022년 2월 준공)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(사업지 추가)

기 존	변 경(추가)
부전로 170번길 15 일원	부전로 170번길 15 및 부전로 174번길 29 일원
L: 92.51m, B : 4∼8.9m, A : 711.422㎡	기존 구간외 L : 25.8m, B : 3∼5m, A : 102.69㎡
금1,250백만원	금1,250백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

경로당 건립(양정1동외3개소)

담당자

노인장애인복지과

최윤호(☎605-5894)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화 된 경로당을 대신하여 지역 노인들을 위한 안전하고 쾌적한 여가       공간활동을 제공하여 노인복지 증진에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. 1. ~ 2022. 4. 23.

○ 위  치 : 양정동 503-15번지 외 4개소

○ 규  모 : 양정1동(신축 1개소/연면적49.58㎡, 리모델링 1개소/연면적 50.68㎡),

가야1동(리모델링/연면적98.88㎡), 연지동(신축/연면적73.8㎡)

가야2동(리모델링/연면적66.12㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,585백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,585	356	780	449
구 비	136	30	106
교 부 세	100	100
민간자본
기 타	1,349	226	674	449

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 완공 : 가야1동 경로당(2021. 10월), 양정1동 경로당(2021. 12월.)

○ 착공 : 가야2동 경로당(2021. 12. 20.), 연지동 경로당(2022. 1. 4.)

□ 향후계획

○ 공사 완공 2건(사고이월) : 가야2동(2022. 2월), 연지동(2022. 4월)

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 지가상승 등으로 인한 부지확보의 어려움으로 당초계획보다 지연됨.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : (당초) 2021.1.1. ~ 2021.12.31. (변경) 2021.1.1. ~ 2022.4.23.

○ 사업내용 : (당초) 양정1동 신축 1개소 (변경) 양정1동 리모델링 1개소 추가

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

부암동 320-88번지 일원 주거지전용주차장(신선마을)

담당자

주차관리과 최선아(☎605-5885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택 밀집지역의 주차난 완화 및 주차칠서 확립을 위한 주차장 확보

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 6. ~ 2022. 11.

○ 위  치 : 부암동 320-88번지 외 5필지

○ 규  모 : 철골식 2단 자주식 48면, A=990㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,812백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,812		660	1,152
국 비
시 비
구 비	1,812		660	1,152
교 부 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2021. 06. : 부암동 320-88번지 일원 소규모공동주차장 조성계획 수립

○ 2021. 06. : 부산진구 공유재산심의위원회 원안의결

○ 2021. 07. : 부산진구 공유재산관리계획 수정의결(지평식⇨철골2단)

○ 2021. 08.~12. : 부암동 320-88번지 외 5필지 부지매입

○ 2021. 10. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 01. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 02. : 주차장 건축(철골조) 신고

○ 2022. 03. : 착공

○ 2022. 10. : 준공

○ 2022. 11. : 주거지전용주차장 운영

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

초읍동 어린이회관 일원 도로개설

담당자

건설과 김민현(☎605-4696)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 일몰제 대비로 도시기반시설을 확보하여 지역 균형 발전 및 관내 가로망 체계 유지

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020.~2022.

○ 위  치 : 성지곡로33번길 29-28 부산어린이회관 후문 일원

○ 규  모 : 도로확장 L=130m, B=4→6m

○ 착공일 : 2021.6.15.(2021.7.일시중지)

○ 준공일 : 2022.12. 예정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	1,100	29	132	939
국 비
시 비
구 비	1,100	29	132	939
교 부 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘21. 6. : 수용재결 신청

○ ‘21. 6. : 공사 착공(2021.7.일시중지)

□ 향후계획

○ ‘22. 6. : 보상 완료 후 공사 재개 예정

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

(2021.12.31.기준)

사업명

초읍동 277-7번지 일원 주거지

전용주차장 건설공사

담당자

주차관리과 최선아(☎605-5885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택 밀집지역의 주차난 완화 및 주차칠서 확립을 위한 주차장 확보

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 12. ~ 2022. 08.

○ 위  치 : 초읍동 277-7번지

○ 규  모 : 지평식 N=20면, A=538㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,125백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년	2024년이후
계	2,125		831	1,294
국 비
시 비
구 비	2,125		831	1,294
교 부 세

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2021. 09. : 초읍동 277-7번지 소규모공동주차장 조성계획 수립

○ 2021. 11. : 부산진구 공유재산심의위원회 원안의결

○ 2021. 11. : 부산진구 자체투자심사심의위원회 원안의결

○ 2021. 11. : 부산진구 공유재산관리계획 원안의결

○ 2021. 12. : 초읍동 277-7번지 계약체결

□ 향후계획

○ 2022. 02. : 잔금 지급 및 등기 이전

○ 2022. 02.~03. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 04. : 공사 착공

○ 2022. 07. : 공사 준공

○ 2022. 08. : 주거지전용주차장 운영

□ 문제점 및 대책(부진사유)

○ 해당사항 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 부산진구에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 부산진구에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

☞ 참고사항

2021회계연도 결산기준 재정공시는 세입‧세출결산 등 자료를 단위이하 반올림

기준으로 작성하였으므로 재정공시금액(백만 원, 억 원 단위 작성)표기상 ±1의

오차가 발생할 수 있습니다.